문서번호	정수시설과-5079
결재일자	2024. 5. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		김영준	05/08
			代신귀식
협조
	주무관		박소현

풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사

재해예방 기술지도 용역(장기2차) 변경계약 계획

2024. 5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사

재해예방 기술지도 용역(장기2차) 변경계약 계획

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5678

「풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사」현장의 재해예방 기술지도 용역(장기2차) 계약에 대한 계약변경 소요가 발생하여 아래와 같이 계약을 변경하여 용역 수행을 원활히 하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조제1항

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 행정안전부 예규 제282호(2024. 4. 1.) 제9장 계약 일반조건

□ 계약현황

ㅇ 계 약 명 : 재해예방 기술지도용역(풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사)장기2차

ㅇ 용역기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 5. 31.

- 1차수 : '23. 6. 1. ~ '23. 12. 31.   - 2차수 : '24. 1. 1. ~ '24. 5. 31.

ㅇ 총부기금액 : 금6,479,000원(금육백사십칠만구천원)

- 1차계약 : 금2,299,000원    - 2차계약 : 금4,180,000원

ㅇ 용역업체 : (주)베스트산업안전(대표: 송승락)

ㅇ 과업내용 : 산업안전보건법 등 관계 법령에 따라 도급인이 산업재해 예방을 위해 준수해야 하는 사항 지도 및 교육

□ 계약 변경사항

ㅇ 지도횟수 변경

***	****	****	***	****
**	***	***	*
**	***	***	****	************
**	***	***	****

ㅇ 사업비 증감 내역                                     (단위: 원)

****		****	****	***	****
* * *	****	*********	*********	*
	****	*********	*********	*********
	****	*********	*********	*********	****

ㅇ 계약기간 변경

- 기 존 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 5. 31.

- 변 경 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30. (1개월 연장)

ㅇ 변경사유 : 소방공사 착공 지연에 따라 기술지도 횟수를 실 착공 시기부터 준공기한까지로 공사기간에 맞추어 집중적으로 지도하기 위해 계약기간 및 기술지도횟수 변경

□ 향후계획

ㅇ 소방공사 기간에 맞추어 기술지도 계약기간 및 횟수 변경계약

붙임 : 1. 용역계약서(장기2차) 1부

2. 변경내역서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.