문서번호	급수운영과-7992
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
반건모		전동근	05/09
			박종일
협조

「2023년 2차 역삼1동 외 14개동 상수도공사」

사토장 변경 검토결과 보고

2024. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

「2023년 2차 역삼1동 외 14개동 상수도공사」

사토장 변경 검토결과 보고

「2023년 2차 역삼1동 외 14개동 상수도공사」의 계약상대자인 ******************** 사토장 위치 변경에 대한 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 공 문

ㅇ 사토장 변경계획 보고[급수운영과-6827(2024.4.19.)]

ㅇ 실정보고[삼송하이드로주식회사 24-04-000(2024.4.18.)]

ㅇ 사토장위치 변경에 따른 현장확인 보고[(주)대한콘설탄트 2024-31(2024.5.3.)]

Ⅱ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 2차 역삼1동 외 14개동 상수도공사

ㅇ 공사기간 : 2024.2.23.~2024.7.15.

ㅇ 계약금액 : *******************************

ㅇ 도 급 자 : ****************

ㅇ 공사개요 : ****************

Ⅲ		변 경 사 유

ㅇ 연간단가공사 특성상 수도권매립지 토사반입 불가능

- 급수공사는 특정 지역을 공사하는 것이 아닌, 강남구 내 불특정 다수지역에서 공사가 시행되어 균일한 토질 시료로 시험성적서 발급이 불가하며,

- 소규모 상수도 공사에서 발생되는 토사는 대부분 일부 부유물(폐아스콘, 암버럭)이 혼합되어 수도권매립지관리공단에서 요구하는 반입기준 충족 불가

⇒ 수도권매립지 토사반입 불가에 따른 대체 사토장 필요

Ⅳ		검 토 내 용

ㅇ 대체 사토장 선정

- 개발행위허가증, 비산먼지 발생사업 신고 등 기타서류 적정

- 건설사업관리기술인 사토장 현장확인 결과 적정

*****************************************************************************************************

ㅇ 공사비 증·감내역

- 운반경로 및 속도변경, 거리 감소로 잔토처리 공종 단가 변경 필요

(단위: 원)

************************************************************************************************************************************************

****************************

Ⅴ		행 정 사 항

ㅇ 사토장 변경에 따른 승인 통보

- 계약상대자인 *************송현근 및 감리사 ****************에게 변경된 사토장에 대하여 승인 통보

ㅇ 해당 공종 설계변경 적용 시행

- 향후 설계변경 시 조정(감액) 적용 시행

붙임  1. 관급토사 반입 기준 강화 안내 공문(수도권매립지관리공단) 1부.

2. 사토장 변경계획 보고 1부.

3. 실정보고(시공사) 1부.

4. 현장실정보고서(감리사) 1부.  끝.