문서번호	기전과-5470
결재일자	2024. 5. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신지수		이래운	05/08
			채충일
협 조
	주무관			최민규

감리 용역 발주 계획

[사평지하차도 진입차단설비 설치 전기공사]

2024. 5.

남부도로사업소

(기 전 과)

감리 용역 발주 계획

[사평지하차도 진입차단설비 설치 전기공사]

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :신지수☎5435

우리 사업소에서 추진 중인「사평지하차도 진입차단설비 설치 전기공사」감리 용역을 시행하여 공사의 원활한 추진과 안전한 작업 환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 전력기술관리법 제12조 제1항

전력시설물의 설치•보수 공사 발주자는 전력시설물의 설치•보수 공사의 품질 확보 및 향상을 위하여 제14조 제1항에 따라 공사감리업의 등록을 한 자에게 공사감리를 발주하여야 한다.

□ 사평지하차도 진입차단설비 설치 계획(기전과-3691, 2024. 3. 26.)

Ⅱ		추진 경과

ㅇ 2024. 3. 26.         : 계획 수립

ㅇ 2024. 3. 27.~4. 1.   : 특정제품 선정심사위원회 개최

ㅇ 2024. 3. 30.         : 물품(진입차단설비, 전광판 등) 구매 발주

ㅇ 2024. 4. 5.~4. 24.   : 전기공사 실시설계 용역

ㅇ 2024. 4. 24.         : 전기공사 발주

ㅇ 2024. 5. 3.          : 낙찰자 결정**********

ㅇ 2024. 5. 7.          : 기술용역타당성 자체심사

ㅇ 2024. 5. 9.          : 전기공사 착공(예정)

Ⅲ		대상 사업

□ 사업 개요

ㅇ 사 업 명: 사평지하차도 진입차단설비 설치 전기공사

ㅇ 사 업 비: **********

ㅇ 사업내용: 진입차단설비 설치에 따른 케이블 배관 및 배선, 접지 공사 등

ㅇ 사업기간: 2024. 5. ~ 6.

ㅇ 설치사례

동작지하차도 진입차단설비(2023.11.)

Ⅳ		용역 개요

ㅇ 용 역 명: 사평지하차도 진입차단설비 설치 전기공사 감리 용역

ㅇ 용역기간: 2024. 5. ~ 6.

ㅇ 소요예산: *********

ㅇ 계약방법: ****

******************************

ㅇ 계약업체: **************

- 선정사유: *******************

ㅇ 지출방법: **************

※ 관련근거:「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」(행정안전부 훈령 제266호)

동일 편성목 내의 낙찰차액을 토지매입비(보상비), 실시설계비, 부대공사비,   감리비로 사용할 수 있다.

ㅇ 예산과목: 남부도로사업소 기전과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구,

재난예방(재난관리기금  재난계정), 시설비및부대비, 시설비

Ⅴ		향후 계획

ㅇ 2024. 5. 8.  : 감리용역 계약의뢰(→ 관리단속과)

ㅇ 2024. 6.     : 용역 준공

붙임  1. 공사 방침서 1부.

2. 감리용역비 산출내역서 및 견적서 각 1부.  끝.