아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	강남소방서 본서 공간 재구성 설계 용역 준공기한 연장 요청서 접수

1. 관련근거

가. 소방행정과-4283(2024.4.3.)호 “강남소방서 본서 공간 재구성 공사 설계 용역 계약 체결 결과”

나. 소방행정과-4373(2024.4.4.)호 “강남소방서 본서 공간 재구성 공사 설계 용역 착수계 접수(알림)”

다. (주)한마루건축사사무소*******01(2024.5.9.)호 “강남소방서 본서 공간 재구성 설계 용역 기간 변경 요청”

2. 강남소방서 본서 공간 재구성 공사 설계 용역 준공기한 연장 요청서 접수를 다음과 같이 보고합니다.

가. 요청내역

계약기간	****	**************************
	***	**************************
	*****	********
계약금액	****	************************
	****	*****

나. 연장사유: 현장대응단 3팀 및 각 부서별 설계내역 변경으로 인한 연장

다. 연장요청(건) 제출자

상 호 명	대표자	사업자등록번호	주 소
****** ******	***	************	*************************************

3. 향후계획

가. ***********************

나. *********************************

붙임  준공기한 연장 요청(건) 1부.  끝.

소방위	이중석		장비회계팀장	김남길		소방행정과장	05/09
신용호
협조자
시행	소방행정과-5923	(	2024. 5. 9.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7421	/전송	02-501-2969	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	부분공개(5)