문서번호	기전과-3932
결재일자	2024. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
조수호		05/10
		문동하
협조

『신내지하차도 외 1개소 진입차단설비 설치 공사(전기)』

설계변경 검토 보고

2024. 5.

성동도로사업소

(기전과)

『신내지하차도 외 1개소 진입차단설비 설치 공사(전기)』

설계변경 검토 보고

『신내지하차도 외 1개소 진입차단설비 설치 공사(전기)』 시행 중 물량변동 및 보험료 정산이 있어 아래와 같이 설계변경을 실시하고 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신내지하차도 외 1개소 진입차단설비 설치 공사(전기)

○ 계약금액 : *************

○ 계약기간 : 2023. 4. 12. ~ 5. 11.

○ 공사위치 : **********

○ 공사내용

*******************************

○ 계약업체 : ********************

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 공사 물량 변동 및 각종 보험료 정산에 따른 설계변경

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분(총차)		계약액	변경액	증감액	비고
도급비	공급가액	***********	***********	***********
	부가가치세	**********	**********	*********
	합계	***********	***********	***********

○ 주요 변경 내역

구 분	규 격	변경 전	변경 후	증,감	비고
** ****	***************	***	***	감)58
	**********************	**	**	증)20
	********************	*	*	증)2
	***********	*	****	증)4.87
** ****	***************	***	***	감)45
	**********************	**	**	증)20
	********************	*	*	증)2
	********	*****	*****	증)4.88
	*****************	*	*	감)7
	*********************	*	*	감)7
	******************	**	*	감)12
	*********	**	*	감)24
	***************	*	*	감)2
*** **	********************

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.