문서번호	시설운영과-4741
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김봉수		05/13
		임성수
협 조

마곡 문화시설부지 거점형 꽃정원 조성 전기공사 설계변경 검토보고

2024. 5.

서울식물원

(시설운영과)

마곡 문화시설부지 거점형 꽃정원 조성 전기공사 설계변경 검토보고

시설운영과장:임성수☎2104-9720 담당:김봉수☎9729

「마곡 문화시설부지 거점형 꽃정원 조성 전기공사」의 보험료 정산 등 변경내역을 반영하여 설계변경하고자 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 마곡 문화시설부지 거점형 꽃정원 조성 전기공사

□ 공사기간 : '23.11.23.~'24.05.20.

□ 공사내용

ㅇ 공원등(5m, 50W) 14본, 공원등(7m, 60W) 4본 신설

ㅇ 볼라드등(1m, 10W) 4개 신설

ㅇ 한전인입 및 분전반 1개 설치

□ 계약금액 : *************************

□ 계약업체 : **************

Ⅱ		검 토 내 용

□ 설계변경 내용

ㅇ 설계변경 사유 : 보험료 정산

ㅇ 변경내역

구 분	변경사유 및 내용	증·감(원)
경비	*******************	***********
일반관리비	*********	*********
이윤	*********	*********
고용개선지원비	*********	***********
부가가치세	***********	*********
계		***********

ㅇ 계약변경 내용

구 분	당 초	변 경	증·감(원)
계약기간	********************	****	*
계약금액	************	************	***********

Ⅲ		보고자 의견

□ 위 내용과 같은 설계변경 내역을 기획행정과에 계약변경 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 및 산업안전보건관리비 검토결과서 각 1부.

3. 산업안전보건관리비 사용내역서 1부.

4. 공사계약서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.