문서번호	설비부-8422
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이환우	조준규	05/13
		신용휴

「시립발달장애인 복지관 별관 건립공사」 기계공사 분야 실정보고(제3회) 검토보고

「시립발달장애인 복지관 별관 건립공사」

기계공사 분야 실정보고(제3회) 검토보고

2024. 05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「시립발달장애인 복지관 별관 건립공사」

기계공사 분야 실정보고(제3회) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는「시립발달장애인 복지관 별관 건립공사」관련  건설사업관리단으로부터 실정보고가 있어 검토보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 사업의뢰부서 반영 요청사항 검토보고(혜원서시장 제2024-159호(2024.05.13.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 시립발달장애인복지관 별관 건립공사

*************************************

********************************

**************************

**************************

**************************************

******************************

□ 검토내용

*********

************************************************

****************************************************

*********

구 분	당 초	변 경	증 감
**	***********	***********	************
*****	***********	***********	************
***	**********	**********	***********
*****	**********	**********	***********

***************************

ㅇ 건설사업관리기술자 검토의견

- 시공사에서 제출한 실정보고에 대하여 변경 사유, 수량산출 및 단가 등을 검토한 결과 적합하다고 판단됨

□ 조치계획

ㅇ 건설사업관리단의 검토보고가 적정하므로 승인 통보하고, 추후 계약금액 반영될 수 있도록 조치하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.