문서번호	급수운영과-6942
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
류태현		05/13
		이용구
협조

『낙성대배수지(1지) 내부방식 공사』

실정 보고에 따른 검토의견 보고

2024. 5. 13

남부수도사업소

(급수운영과)

『낙성대배수지(1지) 내부방식 정비공사』

공사실정 보고에 따른 검토의견 보고

우리사업소에서 시행한 「낙성대배수지(1지) 내부방식공사」에 대하여 서울시설관리공단에서 제출한 현장실정 보고에 따른 검토 의견을 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 낙성대배수지(1지) 내부방식공사(장기1차)

○ 공사기간 : 2023. 8. 3. ~ 2024. 6. 30.

○ 공사개요 : 내부방식 8,709㎡(도막식 4,923㎡, 패널식 3,786㎡)

○ 계약금액 : ************************************

○ 계 약 자 : *******************

○ 감 독 자 : **********

□ 보고내용 및 검토의견

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
1	신축 이음부 보수	• 항 내 신축이음부 노후로 누수가 발생 하여 지수 및 보수작업을 진행하고 추가 공정에 대한 물량 반영이 필요함.	•『타당함』 • 항 내 신축이음부 누수에 대한 지수 및 보수작업 추가공정에 대한 물량 반영을 승인코자 함. • ******************
2	시공물량 변동	• 설계수량과 실측수량 이 상이하여 실측 수량으로 변경이 필요함.	•『타당함』 • 그라인딩, 콘크리트 면정리 및 도막,패널 방수방식등 전체 설계수량을 실측수량 으로 변경을 승인코자 함. • *****************
3	항 내부 구조물 철거	• 항내 집수정의 덮개 구조물로 집수정 내의 방수방식공사의 진행이 불가하여 철거가 필요함.	•『타당함』 • 항내 집수정 방수방식공사 시행을 위해 덮개 구조물의 철거 및 고재처리를 승인코자 함. • ***************

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
4	집진기 임대료 반영	• 그라인딩 및 단면보수 공종중 발생하는 비산먼지의 발생 저감을 위해 집진기의 사용이 필요함.	•『타당함』 • 구민 운동장 내에 위치한 자재인양구 및 환기구가 분진의 유출 우려가 있어 비산 먼지 발생 저감을 위해 항내 집진기의 사용을 승인코자 함. • 개략공사비: 증)3,147천원.

□ 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 서울시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 공사실정 보고 관련서류 각 1부(대용량으로 별도 첨부).  끝.