문서번호	시설관리과-7960
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
권세욱	배승철	05/13
		권승계
협 조

녹신아리수올림터 외 1개소 전력이중화 설계용역 설계변경 보고

2023.  12.

서부수도사업소

(시설관리과)

녹신아리수올림터 외 1개소

전력이중화 설계용역 설계변경 보고

현재 시행중인 아리수올림터 2개소 전력이중화 설계용역 관련 한전 변압기 설치장소 사용협의가 지연되어 계약기간 연장 설계변경을 시행하고자 하여, 검토 후 결과를 보고드림.

□ 관련문서

❍ 용역계약 체결 통보(녹신아리수올림터 외 1개소 전력이중화 설계용역)

[시설관리과-4757]

□ 계약현황

사업명	유형	계약금액	계약기간	수행내용	계약자
녹신아리수올림터 외 1개소 전력이중화 설계용역	용역	7,477,450원	24.3.20. ~24.5.18.	아리수올림터 (녹신, 진관) 전력이중화 설계용역	(주)극동문화전기설계 김경용

□ 설계변경 사유

❍ 용역 과업수행 중 협의사항 발생으로 일정지연

- 녹신아리수올림터 전력이중화에 필요한 한전변압기 신설부지 관련, 녹번대림아파트측과 협의가 완료되지 않음(24.5.20. 입주자 대표회의 개최예정)

- 변압기 부지 협의가 완료된 후, 해당 내용을 설계에 반영하여 7월까지 용역을 완수하려 함.

□ 용역계약 변경계획

❍ 처리의견

- 현재 계약중인 전력이중화 설계용역의 계약기간을 기존 24.5.18.에서 24.7.17.으로 60일 연장해서 변경계약하겠음,

□ 향후계획

❍ 설계변경 심의위원회 개최 : 2024.5.14.

❍ 행정지원과에 변경계약 의뢰 : 2024.5.17. 내

붙임 : 1. 녹신아리수올림터 전력이중화 검토사항 1부. 끝.