아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경(연장) 요청(LED 도로표지병)

우리 사업소에서 시행 중인 「'24년 LED표지병 설치 사업」과 관련하여 관급자재 납품기한 변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 변경내역

품 명 (물품식별번호)	규 격	단위	수 량			납품기한		계약자 (대표자명)	납품요구번호	비고
			당초	변경	증·감	당초	변경
도로표지병 (23597313)	도로표지병, 엠파이브, MAS-8W, Φ126×Φ126×58mm, 백색, 태양광/LED/전지, 점등형	EA	1,029	1,029	-	'24.5.20.	'24.6.15.	(주)엠파이브	12-24-2-21542-00
도로표지병 (24015364)	도로표지병, 성일솔레드, SM600W, Φ134×48.5mm, 백색, 태양광/LED, 점등형	EA	1,084	1,084	-	'24.5.20.	'24.6.15.	(주)성일솔레드	12-24-2-21541-00
도로표지병 (24921341)	도로표지병, 성진종합안전, SJ-W360, Φ135×Φ135×45mm, 백색, 태양광/LED, 점등형	EA	912	912	-	'24.5.20.	'24.6.15.	성진종합안전 (주)	12-24-2-21870-00

□ 변경사유 : 아스팔트 포장으로 인한 납품기한 변경(연장)

□ 예산과목 : 도로보수과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발), 노면표시 유지관리 사업, 시설비 및 부대비, 시설비

끝.

	도 로 보 수 과 장
주무관	심영우		도로보수과장	05/14
안동국
협조자
시행	도로보수과-4179	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 도로보수과 1층 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7951	/전송	02-2657-7960	/	jewido825@seoul.go.kr	/	부분공개(5)