아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 일시중지 알림

우리 부에서 시행중인 '녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계용역'과 관련하여 아래와 같이 용역 일시중지를 하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항 : 용역 중지

구 분	계약자	중지 기간
설계용역	㈜유신 외 3개사	**********************
건설사업관리용역	㈜서경기술공사	**********************

나. 중지사유 : 투자심사(4차) 결과에 따라 과업 추진 필요

붙임  1. 방침서 1부.

2. 과업중지 요청서 및 합의각서 각 1부.  끝.

	토 목 부 장
주무관	박성준		토목설계과장	代이회진		토목부장	05/13
이임섭
협조자	주무관	김종혁
시행	토목부-9572	(	2024. 5. 13.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 청계청사 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2155	/전송	02-6438-2199	/	ch83895@seoul.go.kr	/	부분공개(5)