문서번호	시설건설과-4755
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
오장록		이승우	05/13
			전태호
협조
	주무관		강은영

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구) 강관 비파괴검사용역」

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(2회)

2024.  5.

서울아리수본부

(시설건설과)

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구) 강관 비파괴검사용역」

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(2회)

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설건설과장 : 이승우☎1490 담당 : 오장록☎1497

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구) 강관 비파괴검사용역」에 대한 물가변동으로 인한 계약금액조정(2회) 요청이 있어 '품목조정'에 의한 산정 등의 검토 결과 및 향후계획을 보고 드림

Ⅰ		용역 현황

□ 용 역 명 : 광암수계 배수관로 정비공사(1공구) 강관 비파괴검사 용역

□ 개    요

ㅇ 위상배열 초음파 비파괴검사(PAUT) : 921.0m

ㅇ 자기 비파괴검사(MT) : 9,279.1m

□ 용역기간 : **************************************************

□ 도 급 비 : ****************************

□ 용 역 사 : ㈜지스콥 대표 이승훈

Ⅱ		관련 근거 및 문서

□ 관련 문서

ㅇ *********************************************************

ㅇ ********************************************************

□ 관련 근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 제1항

- 물가 변동으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 계약금액을 조정

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조 제1항

- 직전조정일로부터 90일 이상이 지나고 지수조정률 또는 품목조정률이 3%이상 증감된 경우

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준[행정안전부예규 제282호(2024.3.28.)

- 제9장 공사계약 일반조건 제7절 3.(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

․ 계약 체결 시 계약상대자가 지수조정률을 원하는 경우 외에는 품목조정률 방법으로 계약금액을 조정하도록 계약서에 명시해야한다. 계약서에 명시된 계약금액 조정방법을 임의로 변경 불가능

Ⅲ		검토내용

□ 물가변동 발생 시점 및 산정기준에 대한 검토

ㅇ ****************************************************************************************************************

구 분	기 준	적 용	검토결과
조정 기준일	계약 체결일 이후 90일 경과	*********************** ************************* *******************	**
	100분의 3 증감 발생하는 최초의 시점	******************
조정방법	계약체결 시 명시된 물가변동조정방법	********************	**
적용노임	조정기준일 시점 적용될 노임단가 (공인협회 및 기관)	*************** ******************* ******************************* ************** ********************** *******************************	**

□ 물가변동 계약금액 조정내역 총괄표

구 분				비 고
① 물가변동 대상공사의 계약금액 (A)			***************	· 도급계약서 사본 참조
② 물가변동 적용제외 계약금액(B)			************	· 물가변동 제외 물량에 대한 금액
㉮ 물가변동 조정기준일 (’24. 1. 1.) 기준 비파괴검사 수량 현황	계획투입	PAUT	********	· 실제투입된 검사수량을 반영
		MT	*********
	실투입	PAUT	********
		MT	*********
③ 물가변동 적용대가(C)			***************	· C = ( A - B )
④ 물가변동 지수 조정률(D)			******
⑤ 물가변동 등락 대상 조정금액(E)			************	· E = ( C × D )
⑥ 선금급 공제금액(F)			*	· 해당사항 없음
⑦ 물가변동 조정 적용금액			************	· E - F

1) **********************************

- 기준 : ****************************************************************************************************************************

(부가세포함, 단위 : 원, 소수점넷째자리에서 절삭)

	계약금액 (A)	************ ******** ************		물가변동 적용대가(A-B)		검토 결과
		금 액	비 율(%)	금 액	비 율(%)
합 계	*************	**********	****	*************	*****	**
**************	*	**********	****	*	*
******	*	**********	****	*	*
**********	*	*********	****	*	*

※ ******************************************************

2)***************************

(단위 : 원)

***		***** **** *** *******	*******		**** ***** **************	*** **** *****	***		**** ***** *****
			** ***	**			**	**
비파괴검사	1.위상배열초음파(PAUT)								******** ****** *** ************ ****** **** *** *************** ****
	1)직접노무비	*******	******	**********	******	*****	*****	*********
	2)직접경비	*******	******	**********	******	*****	*	*
	소 계			**********				*********
	2. 자기비파괴검사(MT)
	1)직접노무비	********	******	***********	******	*****	*****	**********
	2)직접경비	********	*****	**********	*****	*****	***	*********
	소 계			***********				**********
합 계				***********				**********
***************				***********				**********
****************				***********				*********
***********				****				*
*********				****				*
****				***********				**********
*****				**********				*********
********				***********				*
총 계				*************				**********

※ ******************************************

3) 물가변동 조정금액 산출[⑦]: ***********

- *****************************************************************

□ **************************************

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증) · 감	비고
계약금액	*************	*************	************

□ 종합의견

ㅇ ************************************************* ***********************************************************

ㅇ *****************************************************************

Ⅳ		향후 계획

□ **********************************************

붙임 1. 비파괴검사 물가변동 보완 검토보고(건설사업관리단) 공문 각 1부.

2. 비파괴검사 물가변동 산출내역 1부.

3. 2024년 서울아리수본부 계약심사 추진계획(방침) 1부.   끝.