아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공기연장 실정보고 승인)

1.업무지시현장 : 서울애니메이션센터 건립공사 주식회사 에이치케이건축사사무소, 서울

애니메이션센터 건립공사 쌍용건설(주), 서울애니메이션센터 건립공사

남광건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2024-05-14 18:05:55

3.지 시 내 용

가. HK(창조) 제2024-123호(2024.05.14.)와 관련 입니다.

나. 우리 본부에서 추진중인 「서울 창조산업허브 조성공사」 관련 ‘공사기간 연장 요청 검토보고’건에 대하여 승인하오니, 변경된 예정공정표에 따라 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 건설사업관리단에서는 기계,전기,통신,소방 등 전체 공정검토 및 건설사업관리기술인 사전 배치조정 등을 통하여 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관	송은숙		건축총괄과장	정채문		건축부장	05/14
소영수
협조자
시행	건축부-7529	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2608	/전송	02-3708-2659	/	201105133@seoul.go.kr	/	부분공개(5)