문서번호	문화관광과-12977
결재일자	2024. 5. 14.
공개여부	부분공개(5)

주무관		도서관운영팀장	문화관광과장		행정국장		부구청장		구청장
백성숙		정은영	최광현		김진만		代김진만		05/14 이필형
협조
	예산팀장			이혜정		기획예산과장		김석기

휘경1동 새싹마루 작은도서관 환경개선 공사 추진계획

▢  사 업 명 : 휘경1동 새싹마루 작은도서관 환경개선 공사

▢  사업기간 : 2024. 7. ~ 12.

▢ 사업내용 : 노후화로 인한 시설물 환경개선 공사

▢  대상시설

시설명	소재지	개관일	규모
휘경1동 새싹마루 작은도서관	외대역동로6길 3, 3층 (주민센터 3층)	'14.07.24.	148.74㎡

▢  소요예산 : 307,160천원

(단위 : 천원)

시설명	예산과목	소요예산	비고
합계		307,160
휘경1동 새싹마루 작은도서관	시설비	19,320	공사 설계용역
	시설비	287,840	건축 및 전기공사 등

동대문구

[문화관광과]

사전 검토 항목
✍ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다.
구 분	사전 검토항목 점검 사항
문서공개	●	결재문서 공개여부를 검토하였는가?					공개 □ 부분공개 ■ 비공개 □
구정비전 반영사항	●	사업목표	:	쾌적 ■ 안전 □ 투명 □ 미래 □						무 □
역점사업 반영사항	●	사업목표	:	꽃의 도시 □ 걷기 좋은 도시 □ 탄소중립도시 □ 아이 키우기 좋은 도시 ■ 스마트도시 □ 재해Zero 도시 □						무 □
고객감동 행정발전	●	(계획수립) 민원발생 소지를 파악하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 사전 주민홍보 방안은 마련하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 지난년도 보다 개선하여 수립하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 다른 사무와의 중복여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(계획수립) 일몰제 적용 대상 여부를 검토 하였는가?						유 □		무 ■
	●	(결과보고) 민원해결, 발생사유 등을 분석하였는가?						유 □		무 ■
법령검토	●	법령	:	유 ■	(법규명 : 작은도서관 진흥법 제3조				)	무 □
	●	방침, 지침 등	:	유 □	(				)	무 ■
	●	전문가 자문 등	:	유 □	(				)	무 ■
기관협의	●	상급기관	:	중앙 □ 서울시 □ 기타 □						무 ■
	●	관계부서	:	유 ■	(	부서명 : 자치행정과, 기획예산과, 휘경1동			)	무 □
	●	기타(민간단체 등)	:	유 □	(	단체명 :			)	무 ■
재원확보	●	확보방안	:	국비 □ 시비 □ 자체 ■ 기타(민자,협찬) □						무 □
절차검토	●	추진절차	:	투자심사 □ 용역심사 □ 심의 □ 기타 □						무 ■
주민참여 갈등관리	●	주민참여	:	설명회 □ 의견청취 □ 기타 □( )						무 ■
	●	민원소지	:	민원발생 가능 □						무 ■
			:	복합민원 □ 단순민원 □
			:	다수민원 □ 단수민원 □
	●	해소방안	:	대책마련 □ 이해·조정 □
홍보계획	●	홍보수단	:	기자설명회 □ 보도자료 □ 기획보도 □ 기고문 □ 인쇄물 □ 기타 □ (IPTV, DID등)						무 ■
청렴성 검토	●	사업목표	:	부패방지 □ 청렴도 향상 □ 공직자 행동강령 준수 □ 청렴한 공직문화 확립 □ 청렴역량 강화 □						무 ■
여성친화도시조성	●	사업목표	:	성평등 □ 여성의 경제 ‧ 사회참여 확대 □ 안전증진 □ 가족친화 □ 여성의 지역사회 활동역량 강화 □						무 ■

	휘경1동 새싹마루 작은도서관 환경개선 공사 추진계획

구립작은도서관 노후화로 인한 내부시설에 대한 환경개선 공사를

추진하여 이용자에게 쾌적한 독서문화 공간을 제공하고자 함

Ⅰ	추진근거 및 추진배경

추진근거

❍『작은도서관 진흥법』제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)

❍『서울특별시 동대문구 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례』제8조(지원)

추진배경

❍ 구립작은도서관 내부시설 노후화로 인한 시설물 개선을 통해

이용객들에게 도서관서비스 및 쾌적한 독서환경 조성

❍ 현재 대상지 주변으로 재개발·재정비 사업이 활발히 진행, 향후

1,800세대 이상 대단지 조성으로 인한 이용객들 수요증가로 선제적

대응이 필요함

❍ 생활권에서 쉽게 접근가능한 도서관 부재(휘경1동 작은도서관 이유임)

동별 구립도서관 현황 [14개동 25개관]

(2024. 1. 1.기준)

동 명	용신동	제기동	전농1동	전농2동	답십리1동	답십리2동	장안1동
도서관수	3	1	1	2	2	1	2
동 명	장안2동	청량리동	회기동	휘경1동	휘경2동	이문1동	이문2동
도서관수	4	1	-	1	3	2	2

휘경1동 작은도서관 현황

도서관명	규모 (면적)	장서수	열람석 (석)	운영시간	정기휴관	인력현황	비고 (개관일)
휘경1동 새싹마루 작은도서관	주민센터 3층 (147.74㎡)	8,115	30	09:00~18:00 (토·일) 10:00~18:00	월 법정공휴일	기간제 2(주중/주말)	'14.7.24.

지역현황

구역명	세대수	면적	준공	비고
휘경3재정비촉진구역 주택재개발정비사업	1,806	64.326㎡(19,458평)	2025.06.	휘경자이디센시아 (2025년06월 입주예정)

위치

휘경1동주민센터	휘경3구역 위치도	배치도

인근 도서관 현황

(2024. 4. 30.기준)

도서관명	위치 (면적㎡)	열람석 (석)	이용인원 (명/일)	장서수 (권)	대상지로부터 이동거리(m)	비고 (개관일)
휘경2동 꿈빛누리 작은도서관	한천로 329, 주민센터 4층 (94.08/28평)	19	57/1	7,452	498m 도보 8분	'14.5.
이문1동 꿈꾸는 작은도서관	외대역동로 114-1 주민센터 3층 (68.82㎡/21평)	16	15/1	6,330	698m 도보 11분	‘14.6.
휘경행복도서관 (휘경2동 소재)	장안벚꽃로 323 (799.6㎡/242평)	103	487/1	17,213	822m 도보 13분	'22.7.4

Ⅱ	대상시설 현황

❍ 개 관 일 : 2014.7.24. ❍ 위 치 : 동대문구 외대역동로6길 3(휘경동) ❍ 운 영 : 직영 ❍ 운영시간 : 화요일 ~ 일요일 (09:00 ~ 18:00) ※ 휴관일 : 매주 월요일, 법정공휴일 ❍ 규 모 : 휘경1동주민센터 3층, 면적 148.74㎡ ❍열 람 석 : 30석

문제점

❍ 일반 사무공간을 활용하여 도서관을 운영함에 따른 공간의 이용

효율성이 낮음

❍ 도서관 이외의 타 기능과의 공간 공유로 인한 민원 증가

(소음 등의 문제 발생)

❍ 협소한 열람 좌석, 낮은 조도의 조명, 노후화된 시설 등으로 인한

이용자의 낮은 만족도

❍ 휘경1동 유일의 도서관이나 도서관으로서의 전문 시설을 갖추지 못함

(타 지역과의 형평성에서의 문제 발생)

개선필요성

❍ 인근 생활권에서 쉽게 접근 가능한 도서관으로서 전문 시설로의

역할 정립 필요

❍ 도서관 전용 공간으로의 재구조화를 통한 이용자의 만족도 제고 필요

❍ 열람공간, 스터디공간, 프로그램 공간의 간섭하지 않은 별도의

공간 구축 필요

❍ 작은도서관 내 타 기능의 명확한 공간 분리를 통한 민원 감소 필요

추진내용 : 전면적 환경개선 리모델링

Ⅲ	세부추진계획

내부 인테리어 설계용역

❍ 용역기간 : 2024. 7. ~ 2024. 9.

❍ 용역내용 : 도서관 환경개선을 위한 내부 인테리어에 따른 일체의

설계도서 작성

❍ 소요예산 : 19,320천원

환경개선 리모델링 공사

❍ 공사발주 : 2024. 10.  ※ 공사기간 : 2024. 11. ~ 12. [45일간]

❍ 공사내용 : 건축·기계설비, 전기, 서가 제작 등

– 기존 시설물 철거공사 및 건축 및 전기공사, 기존 기계, 소방, 통신 설비 이전 및 설치 공사, 가구 및 사인물 설치, 기존 집기류 및 도서 이동 및 보관

❍ 소요예산 : 287,840천원

Ⅳ	소요예산

소요예산 : 307,160천원

(단위 : 천원)

시설명	예산과목	소요예산	비고
합계		307,160
휘경1동 새싹마루 작은도서관	시설비	19,320	공사 설계용역
	시설비	287,840	건축 및 전기공사 등

❍ 예산과목

– 문화관광과, 문화기반 및 조성 및 문화예술 진흥, 도서관 운영 및 지원,

도서관 운영, 시설비및부대비(401), 시설비(01)

Ⅴ	기대효과

도서관 환경개선을 통한 사회 공공성 확보 및 이용자 만족도 제고

지역커뮤니티 거점 환경개선을 통한 주민 소통과 독서문화

공동체 활성화에 기여 등

Ⅵ	향후계획

공사 설계용역 --------------------2024. 7. ~ 9.

발주계획 등록 및 계약심사·공사계약 ---2024. 9. ~ 10.

도서관 휴관 안내 홍보 ----------2024. 9.~ 재개관까지

❍ 시설 공사로 인한 도서관 임시휴관 사전 안내 철저

공사 완료 후 재개관 -------------- 2024. 11. ~12.

끝.