문서번호	설비부-8579
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
정성호		곽용길	05/16
			신용휴
협 조

『당산역 도시고속도로 환승정류장 신설 기계공사』

실정보고(1회) 사항 검토 보고

2024. 5.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『당산역 도시고속도로 환승정류장 신설 기계공사』

실정보고(1회) 사항 검토 보고

「당산역 도시고속도로 환승정류장 신설 기계공사」와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 당산역 도시고속도로 환승정류장 신설 기계공사

ㅇ 위    치 : 서울시 영등포구 당산동 94-6일대

ㅇ 시 공 사 : (주)원피앤에스

ㅇ 공 사 비 : ***************

ㅇ 공사기간 : 2022.12.29. ~ 2024.6.30.

※ 토목 통합발주, 기계 자동제어 하도급 계약 : (주)고려이엔지

ㅇ 감 리 단 : (주)동해종합기술공사

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ 실정보고(자동제어 원격감시 가능 모바일 기능 추가) 검토 보고

(당산감 제24-240호, 2024.5.13.)

□ 검토내용

ㅇ 실정보고 사유

- 유지관리부서(버스정책과) 요청으로 자동제어 원격감시 가능하도록 모바일 기능 추가

ㅇ 실정보고 상세내용

ㅇ 물량증가 내역

품 목	규 격	단 위	수 량			비고
			당초	변경	증감
CIMON-PLC-CIMON-SCADA	500TAG, Development+Runtim	개	-	1	증 1
CIMON-PLC-SCADA MOBILE	CIMON-모바일 서버, SCADA+Option/안	개	-	1	증 1
CIMON-PLC-Application Software	표준화면(1화면 기준, 신규/수정/추가시 동일)	화면	-	1	증 1
컴퓨터	i5-13400/DDR516GB	개	-	1	증 1
모니터	27인치 LED 모니터	개	-	1	증 1

ㅇ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

항 목	당초 ①	변경 ②	증·감 ②-①	비고
직접공사비	436,819,179	454,087,368	증 17,268,189
제경비	132,460,821	136,652,632	증 4,191,811
공급가액	569,280,000	590,740,000	증 21,460,000
부가가치세	56,928,000	59,074,000	증 2,146,000
총계	626,208,000	649,814,000	증 23,606,000

※ 신규대가 협의율 93.377% 적용

□ 건설사업관리단 검토의견

ㅇ 원격 감시가 가능하도록 모바일 기능을 추가하여 추진하는 방안이 자동제어 감시업무 효율을 위해 타당하다고 판단됨

□ 보고자의견

ㅇ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 공사내역에 반영하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 검토공문 1부.  끝.