문서번호	공원여가정책과-6704
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원녹지정책팀장	공원여가정책과장	푸른도시여가국장
노병현	황성묵	박미애	05/17
			이수연

2024 국제정원박람회 행사준비 및 운영계획

2024. 5.

푸른도시여가국

(공원여가정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024 국제정원박람회 행사준비 및 운영 계획

공원여가정책과장  : 박미애 ☎ 2133-2010  공원녹지정책팀장 :황성묵 ☎ 2012  담당  : 노병현 ☎ 2017

2024년 국제정원박람회의 성공적 개최를 위해 개막식 준비 및 운영계획을 수립․시행코자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 분야별 역할

정원조성 (조경과 총괄, 자치구, 사업과 등 협력)		개막행사 (조경과 총괄, 공원여가정책과 협력)		운영관리 (공원여가정책과 총괄,전부서 협력)		언론/홍보 (공원여가정책과 총괄,조경과, 사업과 협력)
✓ 작가정원, 시민정원 등 조성 공정관리 <조경과>		✓ 퍼포먼스, 개막선언, 시상식 등 진행 <조경과>		✓ 운영관리 인력운영 계획 수립시행 <공원여가정책과>		✓ 언론/홍보 기획 및 관련기관 협력 <공원여가정책과>
✓ 마감 식재 마무리 <조경과, 자치구 등>		✓ 시장님 및 주요내빈 사전안내 및 의전 등 <공원여가정책과>		✓ 상황실 운영 및 관리 ************		✓ 프레스투어, 기획기사, 방송사 협력 등 <조경과, 정책과>
✓ 목공 작품, 벤치 배치 등 <공원여가사업과>		✓ 무대설치, 세부 프로그램 운영 등 <㈜환경과조경>		✓ 안내방송 시행 ************		✓ 연계프로그램 운영 및 홍보 <공원여가사업과>

	< 2024 서울국제정원박람회 개요 >
ㅇ 일 시 : ’24. 5. 16.(목) ~ 10. 8.(화) - 본행사 : ’24. 5. 16. ~ 5. 22. (7일간) / 상설 운영 : ’24. 5. 23. ~ 10. 8. ㅇ 장 소 : 뚝섬한강공원 일대(약 200,000㎡) ㅇ 총사업비 : 2,700백만원 ㅇ 주 최 : 서울특별시, 서울국제정원박람회 조직위원회 ㅇ 주 관 : ㈜환경과조경

□ 세부 추진 내용(안)

구 분		주관부서	추진 기간	추진방안
정원조성		조경과	마감식재 (5.7.~5.10)	내용 : 기반정리, 식재작업 실시로 조성 완료 방법 : 참여자별 보유인력․자원 고려해 분배
			행사장 연출 (5.11.~5.15.)	내용 : 개막식 무대 등 행사장 연출
		공원여가사업과	목공 제품 설치	내용 : 목공작품, 벤치배치로 주요 진입부 등 정비 방법 : 자치구 목공센터 지원 작품 활용
개막행사		조경과	개막식 (5.16.)	- 내용 : 서울 가드닝 퍼포먼스, 개막선언, 환영사, 시상식, 기념촬영, 정원관람 등
		공원여가정책과	주요참석자 안내 (5.16.)	대상 : 시장님 및 각국 대사 등 내외빈 내용 : 대상별 전담 인원 배치 관리 □사전안내 연락망 구축 및 당일 의전 수행
운영 관리	상황실 운영 및 인력 배치	공원여가정책과 (협조 : 전부서) ※ 근무계획수립 : 정책과	행사전 (5.8~5.15.)	근무(8명) : 푸른도시여가국(2), 행사대행용역사(4), 방호팀(2) 내용 : 조성정원 식재․시설물 점검, 현장 순찰 ※ 방호팀은 24시간 상황 유지
			본행사 (5.16.~5.22.)	행사대행용역사(33명) : 시설관리 및 행사운영 본청직원 근무 (평일 : 8명, 주말 : 10명) □종합상황반 : 행사장 운영지원, 안전관리 총괄 □정원관리반 : 관람질서 유지, 식재․시설물 점검
			상설전시 (5.23.~10.8.)	행사대행용역사(4명) : 시설관리 및 행사운영 본청직원 근무 (평일 : 2명, 주말 : 4명) □종합상황반 : 행사장 운영지원, 안전관리 총괄 □정원관리반 : 관람질서 유지, 식재․시설물 점검
	안내 방송	공원여가정책과 (협조 : 조경과)	본행사 (5.16.~5.22.)	시간 : 11:00~20:00 (매일 방송) 내용 □행사시간 및 프로그램 안내 □야간 안전․관람 시 유의사항 등 안내
			상설전시 (5.23.~10.8.)	시간 : 10:00~19:00 (매일 방송) 내용 : 야간 안전․관람 시 유의사항 등 안내
언론/홍보		공원여가정책과 조경과	본행사, 상설전시 (5.16.~10.8.)	내용 : 다양한 매체를 활용한 행사 집중 홍보 방법 □언론/홍보 기획 및 관련기관 협력 □프레스투어, 기획기사, 방송사 협력 등 □연계프로그램 운영 및 홍보
		공원여가사업과	상설전시 (5.22.~10.8.)	내용 : 국제정원박람회 장소 활용 연계 프로그램 운영 방법 : 학교, 복지실 등 유관부서 협력 통한 가드닝 교육, 체험 등 프로그램 운영

Ⅱ		추 진 계 획

1. 정원조성

ㅇ 정원조성 및 마감 식재 등 조경 : 조경과

- 식재방안 수립, 소요자재 확보, 현장 근로자 감독 등

- 맥문동 매트, 멀칭 마무리, 틈새 보완식재 등 마감 식재

주요내용	5.7.~9.	5.10	5.11~14
작가정원, 기업정원 등	·관수 등 유지관리 ·기업동행정원 조성	·공모정원 심사 ·기업동행정원 조성 완료	·보완~
마감식재	·맥문동매트 식재 ·관목 및 초화류 식재	·맥문동매트 식재 완료 ·관목 및 초화류 식재 완료	·보완~

ㅇ 목공작품 및 벤치 등 배치 : 공원여가사업과 (조경과 : 배치 협조)

************************************************************************

- 자치구 목공센터(13개) 통해 확보 가능한 목공작품(제품) 파악 및 지원 협의

- 정원조성 공사 진행상황에 따라 적정 시점 및 지점에 작품 배치

주요내용	5.7~13	5.14	5.14~
목공작품 확보	·물품 확보 ※ 노원, 도봉, 은평 등 목공센터	·각 센터에서 현장으로 물품이동	·추가 확보 및 지속 보완
출입구 및 벤치 배치	·현장 배치 지점 및 운영계획 마련	·배치 완료	·지속 보완

2. 개막행사

ㅇ 행사 준비 : 조경과

**********************************

****************************************

***********************************

주요내용	5.7~15.	5.16.	5.17.~
행사장 연출	·행사장 연출 ·정원 유지관리	·개막식 개최	·행사 구조물 관리 ·정원 지속 유지관리 (계절꽃 식재)
행사진행 준비	·행사 진행 준비	·개막식 행사 진행	·본행사/상설전시 프로그램 지속 운영

ㅇ 시장님, 주요내빈 사전안내 및 의전 등 : 공원여가정책과

*****************************************

********************************************

***************************************

*************************************************

************************************

주요내용	5.7~14	5.15	5.16
사전안내 및 행사장 의전	·참석여부, 대상 확인 ·주요역할, 진행사항 등 안내	·참석여부 최종확인, 사전고지사항 안내 등	·참석확인, 영접, 좌석안내, 역할별 시나리오 안내 등

< 개막식 행사 계획 >

□ 개막식 개요

ㅇ 일시/장소 : ’24. 5.16.(목) 16:00~17:30 (90′) / 뚝섬한강공원

ㅇ 주    최 : 서울시, 서울(국제)정원박람회 조직위원회

ㅇ 주요내용 : 서울 가드닝 퍼포먼스, 개막선언, 환영사, 시상식, 기념촬영, 정원관람, 기업동행정원 대표단 면담 등

ㅇ 참     석 : 약 300여명

***************************************************

*******************************

*****************************************************

************************

□ 행사일정(안)

시 간	내 용	비 고
***********	***********	*****************
***********	************	******************
***********	******************	*******************************
***********	*************************	************
***********	****************	***
***********	****************	*********
***********	******************	***
***********	**	**************** ********************
***********	*********	*********
***********	****	**************
***********	*****	*******************
***********	*************	*****
***********	******************	*************

	********
************************************************ ***********************************************

3. 운영관리

①		상황실 운영

< 추진체계도 >

	종합상황실 □총괄 : 푸른도시여가국장 □운영 : 공원여가정책과장
			보고
	협력・지원	현장상황실 □총괄 :***** □운영 :*********
*** ***************************					* ***************	****************************************

□ 상황실 주요역할

ㅇ 종합상황실 : 푸른도시여가국 내 설치․운영

- 행사운영, 안전관리, 유관기관 협력 등 종합상황 관리 및 대응

ㅇ 현장상황실 : 뚝섬안내센터 3층 관제실 내 설치․운영

- 현장상황 수집 및 보고, 질서유지 및 안내, 안전관리, 현장근무자 배치 및 운영 등

□ 유관부서 협력사항

ㅇ 미래한강본부

- 방송 및 관제장비 제공, 안전관리 인력 지원, 야간 방범 등 운영․관리 지원

ㅇ 광진구

- 행사장 관리 및 프로그램 운영 지원, 정원 및 부대 조경 시설 설치․운영 협력 등

ㅇ 기타 협력부서

- 서울브랜드담당관(해치 아트벌룬, 굿즈샵 등), 스마트건강관(9988홍보부스), 국립수목원(홍보부스), 국립생태원(수생식물 정원 조성), 서울시민정원사회(프로그램 연계운영) 등

②		근무인력 운용

□ 근무인력 배치 계획

구분	기간	운영시간	근무 인력(안)	근무시간	비고
행사전 8명	5. 4.(토) ~ 5. 15.(수)	-	푸른도시여가국 2명	09:00~18:00
			행사대행용역사 4명	09:00~18:00	24시간 근무자 배치
			방호팀 2명	18:00~ 09:00
본행사 최대 55명	5. 16.(목) ~ 5. 22.(수)	12:00 ~ 19:00	(평일)푸른도시여가국 8명 (주말)푸른도시여가국 10명	11:00~20:00
			행사대행용역사 30명 (안전스태프 포함)	11:00~20:00	24시간 근무자 배치
			방호팀 3명	24시간
			구급대원(사설) 2명	11:00~20:00
			모범운전자회 10명	개막식·주말 3일
상설전시 최대 8명	5. 23.(목) ~ 10. 8.(화)	12:00 ~ 19:00	(평일)푸른도시여가국 2명 (주말)푸른도시여가국 4명	11:00~20:00	<총괄> 조경과 실무사무관 2명
			행사대행용역사 4명

※ 미래한강본부 : 뚝섬안내센터 공공안전관 3명(상시), 한강기동순찰반 3명(본행사 기간)

※ 광진경찰서 : 순찰차 및 자율방범대원 상시 배치

□ 행사기간별 인력운영 세부계획

(1) 행사 전 : ’24. 5. 4.(토) ~ 5. 15.(수)  [12일간]

ㅇ 주요 업무 구분

- 행사대행용역사(6명) : 정원박람회 관련 시설물 관리, 현장순찰(주간4/야간2)

- 본청 직원 현장근무자

· 현장점검반(조경과) : 조성정원 식재 및 시설물 이상유무 점검, 특이사항 전달

근무시간 (행사운영시간)	구분	주말(토)	주말(일)	월	화	수	목	금
09:00~18:00	현장점검반	2명		2명

(2) 본행사 기간 : ’24. 5. 16.(목) ~ 5. 22.(수)

ㅇ 주요 업무 구분

- 행사대행용역사(33명) : 정원박람회 관련 구조물 관리 및 행사 운영(주간30·야간3)

- 본청 직원 현장근무자

· 종합상황반(조경과) : 행사장 운영지원, 안전관리, 특이사항 보고 등 운영 전반 총괄

· 정원관리반(푸도국) : 조성정원 관람 질서 유지, 식재 및 시설물 이상유무 점검

근무시간 (행사운영시간)	구분	5.16.목 개막식	5.17.금	5.18.토	5.19.일	5.20.월	5.21.화	5.22.수
11:00~20:00 (12:00~19:00)	종합 상황반	조경과 전직원 /푸도국 지원	4명	6명	6명	4명	4명	4명
	정원 관리반		4명	4명	4명	4명	4명	4명

(3) 상설전시 기간 : ’24. 5. 23.(목) ~ 10. 8.(화)

ㅇ 주요 업무 구분

- 행사대행용역사(4명) : 상설전시 기간 박람회장 운영 및 시민 안내(주간4)

- 본청 직원 현장근무자

· 종합상황반(조경과) : 행사장 진행, 안전관리 등 운영 전반 총괄

· 정원관리반(푸도국) : 전시정원 관람 질서 유지, 식재 및 시설물 이상 유무 점검

근무시간 (행사운영시간)	구분	주말(토)	주말(일)	월	화	수	목	금
11:00~20:00 (12:00~19:00)	종합상황반	2명		2명
	정원관리반	2명		-

※ 정원관리반 근무방법

- 1개조(2인) 근무시 : 초청 – 작가 – 학생 · 시민 – 기업동행정원 순찰

(순찰순서 : B6-B7-초청-A3-A2-A1-B2-B5-학생,시민정원-B1-B3-B4-기업동행정원 순)

- 2개조(4인) 근무시 : (1조) A존 / (2조) B존 순찰

[순찰순서 : (1조) A1-B2-B5-디즈니-학생,시민정원-B1-B3-B4 / (2조)B6-B7-초청-A3-A2-기업동행정원]

※ 집결/출·퇴근서명/휴식장소 : 뚝섬안내센터 3층 종합상황실

종합상황실

③		안내 방송

□ 안내 방송 일정

ㅇ 추진기간 : ’24. 5. 16. ~ 10. 8.

ㅇ 방송시간 : (5~8월) 11:00 ~ 20:00 (9~10월) 10:00 ~ 19:00 (시간별 1회)

ㅇ 시간별 방송(안) : 5~8월 기준

방송시간	방송내용	공통사항
11:00	행사 시간 알림	ㅇ 관람시 주의사항 안내 - 관람 질서 유지 안내 - 자전거는 자전거 전용도로로 우회 - 정원을 밟거나 훼손하지 않도록 안내
12:00	행사 시작 알림 그날의 행사 일정 안내
13:00~18:00	시간대별 프로그램 안내
18:50	행사 마감 알림
20:00	야간 안전 유의사항 알림

《 시간대별 정례 안내 》

<11:00 행사 시간 알림>

안녕하세요. 이곳 뚝섬한강공원은 10월 8일까지 서울국제정원박람회가 펼쳐집니다.

본행사는 5월 16일부터 22일까지, 공식행사시간은 오후 12시부터 저녁 7시까지입니다.

저마다의 매력넘치는 정원들과, 즐거움을 더해줄 다양한 프로그램을

이곳 뚝섬에서 만나보세요.

그럼 잠시후, 열두시에 정원에서 만나요.

<12:00 행사 시작 알림>

2024 서울국제정원박람회를 찾아주신 여러분, 반갑습니다.

이번 국제정원박람회는 지금까지중 가장 많은 정원, 가장 많은 기업, 가장 많은 시민과 함께 가장 긴 기간 선보이는 아주 특별한 축제입니다.

더 안전하고 쾌적한 정원 관람을 위해 몇가지 안내 말씀 드릴게요.

공원 내에서는 흡연과 취사행위를 할 수 없으며, 흡연은 흡연부스를 이용해 주시기 바랍니다. 자전거는 자전거 전용도로로 우회해 주시고요.

귀여운 애완동물과 함께 오셨다면 목줄을 꼭 착용해주세요.

쓰레기는 아름다운 정원을 아프게 할 수 있으니 주변 분리수거함에 넣어주시고,

주위에 어린이와 노약자가 있다면 양보해 주시고 도와주시기 바랍니다.

화재 등 비상상황 발생 시에는 안내요원의 안내에 따라 질서있게 행동해 주시고,

미아 발생 또는 분실물을 습득하였다면 종합안내소 혹은 주변 안내 요원에게 말씀해주세요.

무엇보다 열심히 꽃피운 정원이 훼손되지 않도록, 아끼며 관람해주세요.

이제, 정원 관람 준비는 다 되었답니다.

그럼, 아름다운 정원의 바다를 거닐어보세요,

당신만의 꿈꾸는 정원이 펼쳐집니다.

<13:00~18:00 시간대별 프로그램 안내>

잠시후 00시부터 0000에서는 00000행사가 시작될 예정입니다.

관심있으신 시민 여러분께서는 직접 참여하여 정원의 즐거움을 느껴보세요.

<18:50 행사 마감 안내>

2024년 서울국제정원박람회를 찾아주신 시민여러분,

어느덧 뚝섬한강공원에도 해가 저물기 시작하고 노을이 지려 하고 있네요.

오늘 하루 높은 빌딩과, 자동차 소음 가득한 아스팔트가 아닌

정원에서 시간을 보내며 어떠셨나요?

여러분의 삶에 작은 위안과 힐링이 되었다면 너무 기쁠 것 같습니다.

공식행사시간은 19시까지로 오늘의 서울국제정원박람회는 종료되었음을 알려드립니다.

저희는 여러분의 삶에 아주 잠시라도 위안이 되기 위해

내일도 정원의 꽃을 피우고, 더 예쁘게 가꿔나가겠습니다.

정원과 오늘을 함께한 당신의 내일은 분명 활짝 피어날거에요.

또 휴식이 필요할 때 언제든 다시 찾아오세요. 서울의 정원은 언제나 여러분 곁에 있습니다.

서울국제정원박람회는 꽃을 닮은 여러분의 인생을 응원합니다.

꽃길 따라 안녕히 가세요.

《 미아 발생 시 》

안 내 문 안	유의사항
<미아 찾을 경우 – 범죄 발생 우려 성명은 방송 금지> 2024 서울국제정원박람회를 방문하여 주신 시민 여러분 감사합니다. 잠시 안내 말씀드립니다. 실종아동 발생에 따른 경보를 발령합니다. (________)색 티셔츠에 (_______)바지를 입고, (____)신발을 신고 있는 (_____)살 가량의 여자(남자) 어린이를 찾고 있습니다. 어린이를 보호하고 계신 분이나 주위에 이와 유사한 어린이가 있는 경우 또는 보신 경우에는 종합안내소에 알 주시거나 보호자 010-( )-( )으로 연락하여 주시기 바랍니다. 여러분의 적극 적인 협조 부탁 드립니다. 감사합니다. <미아 보호하고 있는 경우 > 서울정원박람회를 방문하여 주신 시민 여러분 감사합니다. 공원 이용에 관하여 잠시 안내 말씀드립니다. 어린이를 보호하고 있습니다. (________)색 티셔츠에 (_______)바지를 입고, (____)신발을 신고 있는 (_____)살 가량의 여자(남자) 어린이를 보호하고 있습니다. 어린이 보호자분께서는 종합안내소로 오시거나, 전화 010-( )-( )으로 연락하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. <상황 발생 종료 시 > 시민 여러분께 잠시 안내 말씀드립니다. 조금 전 ○○시○○분경에 발생한 실종아동은 시민 여러분의 협조 덕분에 무사히 가족에게 돌아갔습니다. 시민여러분의 협조에 감사드리며, 실종아동 발생에 따른 경보를 해제 합니다. 감사합니다.	※ 신속한 상황 전파가 중요, - 안내요원 미아 찾기 실시 - 성명, 연령, 성별, 신체특징, 사는곳, 연락처 등 관련 정보 파악 - 미아를 찾지 못한 경우 부모 동의를 받아 경찰청 (182, 112) 신고 ※ 범죄관련 실종 의심시 즉식 경찰서 신고 미아발생 경보발령, 방송 2회 반복 방송, 10분 마다

《 공연 등 취소 시 》

안 내 문 안	유의사항
◎ 시민 여러분께 알려드립니다. 예기치 못한 무대사정(출연자 사정, 정전 등)으로 인해 공연을 중단(취소)하게 되었음을 알려드립니다. 시민 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 드리며, 안내 요원의 안내에 따라 질서 있게 이동하여 주시길 부탁드립니다. 부득이 공연이 취소된 점 다시 한 번 깊이 사과의 말씀을 드립니다. 감사합니다.	※ 필요 시 총책임자가 직접 설명

《 비상사태 발생으로 긴급대피(철수) 시 》

안 내 문 안	유의사항
◎ 시민 여러분께 안내 말씀드립니다. 갑작스런 사고로 인해 행사진행이 불가능하게 되었음을 알려드립니다. 시민 여러분께서는 안내원의 유도에 따라 침착하게 대피하여 주시기 바랍니다. 대피 시에는 앞 사람을 밀치거나 서두르시면 압사 사고 우려가 있으므로 앞 사람을 따라 천천히 질서 있게 이동하여 주시기 바랍니다. 또한, 이동시 119 구급대원 등 안전·구조요원의 활동에 방해가 되지 않도록 질서를 유지하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.	※ 방문객이 신속하고 안전하게 이동하도록 하는 것이 핵심

《 화재발생에 따른 긴급대피 시 》

안 내 문 안	유의사항
◎ 시민 여러분께 안내 말씀드립니다. 뚝섬한강공원 ○○쪽 에서 화재가 발생하였습니다. 발생한 화재는 즉시 소화에 들어갔습니다. 시민 여러분께서는 안내원의 유도에 따라 침착하게 바람의 반대 방향 공터 등 안전지역으로 대피하여 주시기 바랍니다. 대피시에는 앞 사람을 밀치거나 서두르시면 압사 사고 우려가 있으므로 앞 사람을 따라 천천히 질서 있게 이동 하여 주시기 바랍니다. 또한, 이동 시 119 구급대원 등 안전·구조요원의 활동에 방해가 되지 않도록 질서를 유지하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. □ 소화기 사용방법 안내(필요 시) - 불이 발생한 곳으로 소화기를 이동 합니다. - 손잡이 부분의 안전핀(노즐)을 뽑습니다. - 바람을 등지고 분사구를 불이 난 방향으로 향하게 잡습니다. - 손잡이를 꽉 움켜쥐고 불을 향해 분사한다.	※ 방문객이 신속하고 안전하게 이동하도록 하는 것이 핵심

《 관람객 혼잡 예상시 》

안 내 문 안	유의사항
◎ 시민 여러분께 안내 말씀드립니다. 2024 서울국제정원박람회를 방문해 주셔서 감사드립니다. 안전하고 쾌적한 관람을 위하여 좁은 길에서는 천천히 이동해주시고 앞 사람을 따라 질서 있게 정원을 관람해주시기 바랍니다. 또한 인파가 몰려있는 지역에서는 옆 사람과 적정 간격을 유지해주시고 안전관리요원들의 안내를 따라 여유를 가지고 행사를 즐겨주시면 감사하겠습니다. 보다 안전한 박람회가 될 수 있도록 관람객 여러분들의 많은 도움 부탁드립니다. 감사합니다.	※ 관람객 혼잡 예상시간 (5. 16.~5. 22. 14:00~18:00) 및 기타 혼잡 예상 시간에 1시간 마다 안내

4. 언론/홍보

ㅇ 언론/홍보 추진

- 국내외 관광객의 참여 확대를 위한 글로벌‧브랜드 홍보 강화

- 다각적 홍보 채널 확보 및 온‧오프라인 홍보 규모 확대로 노출 극대화

- 행사기간에 맞춰 시기별‧단계별 맞춤 홍보 콘텐츠 기획 및 제작

*********

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 세부 추진 내용

주요내용	주요내용
****	******************************* ********************************************************* ************************************************** *******************************************
***	*********************************************** ******************************************** ***************************************** ************************************** *************************************** *************************************************
****	******************* ********************************************************** **************************** ****************************************************** ************************************************************** ************************************ ************************************** ***************************************************

ㅇ 시민참여 가드닝 프로그램 운영

- (내용) 학생, 어르신, 장애인, 자립준비 청년 등 대상 가드닝 체험
프로그램 기획 운영(유관부서 협력) - 6~10월 토, 총 20회

- (장소) 뚝섬 자벌레 3층

- (예산) 20백만원(자치단체경상보조, 광진구)

주요내용	5월	6~10월	11월
가드닝 체 험	·사업계획 수립 ·예산재배정	·프로그램 운영	·결과분석

Ⅲ		향후일정

ㅇ 종합상황실 운영 및 근무인력 배치계획 수립	: ’24.5.10(금)

ㅇ 조직위원회 현장 점검	: ’24.5.10(금)

- 2024 국제정원박람회 조직위원회 위원 참석, 현장점검 및 조치

ㅇ 종합상황실 및 현장 상황실 가동	: ’24.5.13(월)~

ㅇ 1차 현장 점검회의 개최	: ’24.5.13(월)

- 푸른도시여가국 각 부서장, 미래한강본부 공원부장 등 참석

ㅇ 푸른도시여가국장 현장 점검	: ’24.5.15(수)

- 푸른도시여가국장, 각부서장, 미래한강본부 공원부장 등 참석