문서번호	정수시설과-1632
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄용섭		최병희	05/17
			윤준성
협 조	행정관리과장			정종철
	정수과장			代조성연
	주무관			代이승열
	주무관			이기만
	주무관			이진근

염소처리 설비 및 노후배관 교체공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

염소처리설비 및 노후배관 교체 계획

강북아리수정수센터소장:윤준성☎3146-5801 정수시설과장:최병희☎5870 담당:엄용섭☎5817

노후된 염소처리설비 및 배관을 교체하여 염소가스 누출 사고에 만전을 기하고, 안정적인 수처리 공정을 하고자 함.

1		설비현황

구 분	설비명	규 격	설치년도	설비 사진
** ** **	**** ****	**** ****	*****	*
	**** ***	***** ******* *******	*****	*
	**** ****	***** ******** ***	*****	*
** **	*** ****	*** ****	*****	*

2		사업배경

□ 계측장치 노후화로 정확한 염소용량 측정 어려움

□ 중화설비 노후화로 염소가스 누출 시 즉시 대응 차질 우려

※ 염소처리설비 내용연수 : 7년

□ 배관 표면 노후화로 인한 수포 발생으로 염소가스 누출 위험

□ 기존 노후설비 교체하여 염소가스 누출 등 안전사고 예방

□ 안정적인 수처리 공정으로 아리수 생산에 기여.

3		발주계획

□ 사 업 명 : 염소처리설비 및 노후배관 교체

□ 사업내용

◯ 염소용기 계측장치 2대 교체

◯ 염소중화설비 배기팬, 순환펌프 교체

◯ 염소가스필터 3대, 염소용기걸이 2대 교체

◯ 후염소 공급배관 옥외 매립구간 교체

-1·2계열 2열 L=248m, 3·4계열 2열 L=239.5m)

□ 계약방법

○ 공사 시행

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 참가자격

- 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 기계가스설비공사업 주력분야   가스시설공사(제1종)[구.가스시설시공업(1종)]으로 등록한 업체

- 중소기업기본법에 의한 중소기업자로서, 국가전자조달시스템에   염소투입기(세부품명번호: 4710150501)를 제조물품으로    입찰참가 등록하고 직접생산증명을 보유한 업체

- 법인등기부상 본점소재지(개인사업자의 경우, 사업자등록증이나 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련 서류의 사업장 소재지)가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

□ 사업 예산

◯ 소요예산 : *******

◯ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,                      정수센터 시설 유지보수, 기계장치, 시설비 및 부대비

(염소처리설비 및 노후배관교체)

□ 추진일정

○ 2024. 5월중순 ------------------ 심사요청(본청 계약심사과)

○ 2024. 6월중순 ------------------------- 발주 및 계약

○ 2024. 6월말 ~ 11월초 --------------------- 공사 시행

○ 2024. 11월말 ------------------------------- 준공

붙임   1. 설계내역서 1부.

2. 시방서(규격서) 1부.

3. 설계도면 1부.  끝.