아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	미아119안전센터 앞 긴급출동신호제어시스템 교통신호기 설치공사 공사기간 연장에 따른 계약 변경 요청

1.관련근거

가. 재난관리과-3120(2024.5.9.)호 "공사기간 연장에 따른 합의서 제출"

나. 재난관리과-3121(2024.5.9.)호 "계약변경 검토 요청서(교통신호기 설치 공사)"

다. 소방행정과-4266(2024.4.19.)호 "강북소방서 긴급출동 신호제어 시스템 감리 계약체결 및 착수계 접수"

라. 소방행정과-4462(2024.4.24.)호 "긴급출동 신호제어 시스템 교통신호기 설치공사 계약체결 결과 알림"

마. 재난관리과-1461(2024.3.6.)호 "미아119안전센터 신호제어시스템 설치 계획"

바. 교통운영과-822(2024.1.16.)호 "교통 신호등주 표준도면 추가 수정(2024.1.15.)안내"

2. 미아119안전센터 앞 긴급출동신호제어시스템 감리용역 및 교통신호기 설치공사 공사기간 연장 요청에 따른 계약 변경을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 건    명: 강북소방서 긴급출동신호제어시스템 감리 및 설치 공사

나. 업 체 명

○ 감  리: ****************************

○ 공  사: ****************************

다. 변경사유: 신호등주 관급자재의 조달청 등록지연으로 인한 계약기간 연장

○ 감  리: 기존 2024.4.18. ~ 2024.6.16. → 변경 2024.4.18. ~ 2024.7.31.

○ 공  사: 기존 2024.4.23. ~ 2024.6. 9. → 변경 2024.4.23. ~ 2024.7.31.

붙임  1. 공기연장사유서(감리) 1부.

2. 계약변경 검토 요청서(교통신호기 설치 공사) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
소방교	박상민		대응총괄팀장	박종구		재난관리과장	05/16
차근철
협조자
시행	재난관리과-3189	(	2024. 5. 16.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	psm7796@seoul.go.kr	/	부분공개(7)