문서번호	도시철도건축부-4233
결재일자	2024. 5. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
배현중		김광기	05/20
			박신규
협조
	주무관		이종상

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정 보고 검토

2024. 5.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

별내선(8호선 연장) 1공구 암사역사공원역 건설공사 관련 운영사 요구사항, 도철건축부 자체점검 결과 및 설계도서 수량 변경에 따른 설계변경 실정보고 검토임

▢ 관련 근거

ㅇ 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』

- 제9장 계약 일반조건, 제6절 공사 설계 변경

ㅇ 운영사(서울교통공사) 요구사항 반영 협조 요청

- 도철설비부-2611(2024.3.6.)

- 서울교통공사 철도사업처-2010(2024.4.18.)/2136(2024.4.26.)

ㅇ 별내선(8호선연장) 암사역사공원역 건축분야 자체 점검결과 보고

- 도시철도건축부-3206(2024. 4. 8.)

ㅇ 별내선 1공구 실정보고 승인요청[도시철도건축부-4152(‵24. 5. 20.)]

▢ 실정보고 내용

ㅇ 운영사(서울교통공사) 요구사항

- *********************

****************************************

- **********************

․ **************************************************************************************************************************************

- **************

**************************************

ㅇ 도철건축부 자체점검 결과

- *****************************

*********************************

ㅇ 설계도서 수량 변경

- **********************************

- ****************************

▢ 검토 내용

ㅇ 설계변경 적정 여부 검토 : 적정

- ***********************

․ **********************************

*************************************

- **********

․ **********************************

*************************************************

ㅇ 계약금액 변경 공사내역 검토

- 기존 도급내역 수량 및 규격 변경 항목: 기존 단가 적용

- 기존 도급내역 미반영 항목: 신규 단가 적용

(24년 상반기 노임 적용, 협의율 반영)

- 변경 공사내역

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 공종별 세부내역 붙임 문서 포함

ㅇ 설계변경 금액 총괄

*************************************************************************************************************************************************************************************************

▢ 검토 결과

ㅇ 관련 법규 및 내역검토 결과 건설사업관리단의 실정보고에 대한 승인이 타당하고 향후 설계변경 처리

※ 건설사업관리단 검토의견

- 발주처, 운영사 요구사항 및 설계도서 수량변경에 따른 설계변경으로 수량 및 금액 검토하였으며, 변경 금액은 차후 설계변경 시 반영함

▢ 향후 계획

ㅇ ‵24. 5.  실정보고 승인처리(도시철도건축부 → 건설사업관리단)

ㅇ ‵24. 6.  6차 공사 준공 시 도급내역 설계변경사항 반영

붙임)   별내선 1공구 실정 보고 승인요청 1부.  끝.