문서번호	급수운영과-8929
결재일자	2024. 5. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김동하	박상열	05/20
		채재일
협 조

2023년 서대문구 관내 상수도공사』

설계변경 심의회 결과 보고(2차)

2024. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

『2023년 서대문구 관내 상수도공사』

설계변경(2차) 심의회 결과 보고

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 김동하☎3673

「2023년 서대문구 관내 상수도공사」의 설계변경(2차) 심의회 결과 보고임.

Ⅰ		공사 및 설계변경 현황

❍ 공사현황

- 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사

- 계약기간: 2023. 07. 03.~2024. 06. 30.

- 도 급 비: **************

- 공사개요: ********************

- 시 공 사: (주)운악건설 대표****

- 공사감리: (주)천일 건설사업관리기술자 ***

❍ 설계변경 현황

- 공사개요(2차수)

• 당초: ******************

• 변경: ******************

- 변경사유: 신규공종 및 시공에 따른 물량 증·감 발생

- 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 공사비		*************	*************	-
도급비	1차수(2023년)	***********	***********	-
	2차수(2024년)	***********	***********	-
	총 차	*************	*************	-
관급자재비		***********	***********	-
도로복구비 및 기타		***********	***********	-

Ⅱ		심의개요

❍ 심의 개요

❍ 심의위원 구성

- 위원장: 급수운영과장 ***

- 위  원: 급수운영과 시설6급 *************

시설관리과 시설6급 ***************

❍ 심의회 개최

- 일  시: 2024. 5. 20.(월) 09:30

- 장  소: 전자결재 서면 심의

- 안  건: 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」 설계변경(2차)에 대한 적정 여부

❍ 심의 검토사항

- 신규공종 적정성 여부

- 공종별 수량 산출 적정성 여부

- 기타 관련사항 적정성 여부 등

❍ 심의 의견: 적정함

Ⅲ		향후계획 및 행정사항

❍ 상기와 같이 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」의 설계변경 심의회를 개최한 결과 적정하여 계약상대자와 합의 후 설계변경(2차)를 시행코자 함.

❍ 설계변경(2차) 계약 의뢰 - 행정지원과

❍ 부단수차단 공종 하도급계약 실시

붙임  1. 설계변경 심의의결서 1부.
2. 설계변경 심의위원회 개최 공문 1부.
3. 설계변경 내역서 1부.
4. 설계변경 심의설명서 1부.  끝.