아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		광암아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	변경계약시행(2024년 액화염소용기 재검사(용역))의뢰

1. 2024년 액화염소용기 재검사(*********************)에 계약기간을 변경 (연장)하고자 합니다.

가. 계 약 명 : 2024년 액화염소용기 재검사(용역)

나. 계약기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 6월 30일 까지

다. 변경기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 9월 30일 까지

라. 변경사유

- 액화염소용기 반출이 늦어져 수급 불균형이 발생

마. 업 체 명 : *********************************

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(액화염소 용기 재검사)

*****************************

끝.

	정 수 과 장
주무관	이건우		주무관	소명이		정수과장	05/20
조우현
협조자
시행	정수과-5125	(	2024. 5. 20.	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5341	/전송	02-3146-5309	/	rokmc921@seoul.go.kr	/	부분공개(7)