문서번호	시설관리과-4112
결재일자	2024. 5. 22.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
임무환		소영신	05/22
			이유국
협 조
	총무과장			김영창
	기획예산과장			이강수
	주무관			장나영

『안양천교 자전거도로 구조개선공사』

설계변경 시행 보고(전체-1회,1차-2회)

2024.  5.

미래한강본부

[시 설 부]

『안양천교 자전거도로 구조개선공사』

설계변경 시행 보고(전체-1회,1차-2회)

『안양천교 자전거도로 구조개선공사(장기계속)』 추진 중 건설사업관리자 (주)천일로부터 제출된 전체분(1회), 1차분(2회) 관련 검토결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 안양천교 자전거도로 구조개선공사

○ 위    치 : 양화한강공원(서울시 강서구 염창동 221-2)

○ 사업기간 : 2023.10. 10. ~ 2026.  2. 25.

○ 규    모 : 교량 신설(B=9.5m,L=180m ), 기존 교량 철거(B=6.0m,L=229m)

○ 도급액(총액):  8,718,475,000원 (1차분 : 2,150,000,000원)

○ 시 공 사 : 석영토건(주) 대표 서용식, 외1개사

□ 설계변경 개요

○ 변경 사유 : 현장여건 변경에 따른 신규공종 및 물량 증·감사항 반영

- 교각기초(현장타설말뚝) 안전성 확보를 위한 자반조사 추가 9개소

- 교대 흙막이 근입 깊이 조정

- 지오튜브(모래채움) 공법 변경

- 기타 현장여건 변경에 따른 신규공종 및 물량 증·감사항 반영 등

○ 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
전체분-1차	8,718,475,000	9,057,400,000	증	338,925,000
1차분-2회	2,150,000,000	3,003,341,000	증	853,341,000

※ 설계변경자문위원회 심의결과 반영(시설관리과-3999('24.5.17.)

ㆍ경비항목으로 조정 : (신규) 표준관입시험비, 성과분석·보고서, CC-TV설치비 전체 경비항목

ㆍ산재보험료 요율 조정 : '24년도 설계변경 증액분(요율 3.7% → 3.56%)

○ 주요공종 물량 증･감 사항 : 붙임 변경내역서 등

□ 조 치 계 획

○ 상기와 같이 설계변경 시행하고자 함.

붙 임: 1. 미래한강본부 설계변경자문위원회 심의결과 1부.

2. 건설사업관리(책임감리) 검토의견서 1부.

3. 합의각서 1부.
4. 설계변경내역서(전체분-1회, 1차분-2회) 각 1부.

5. 제비율검증표 (전체분-1회, 1차분-2회) 각 1부. 끝.