아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	변경계약체결[풍납취수장 환경개선공사 패키지에어컨 구매] 보고 및 통보

1. 정수시설과-5451(2024.05.20.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약체결 되었음을 보고합니다(알려드립니다).

가. 건   명 : 풍납취수장 환경개선공사 패키지에어컨 구매

나. 변경사유 : 선행공사 지연

다. 계약업체 : (주)에이디앤씨

라. 변경내역

당 초			변 경
계약체결일	계약기간	계약금액(원)	변경계약 체 결 일	계약기간	계약금액(원)
2024.02.08.	2024.02.08.~ 2024.05.08	6,033,000	2024.05.20.	2024.02.08.~ 2024.05.24	6,033,000

붙임  1. [2024.4.1지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제282호) 1부.

2. 계약보증금 지급각서 (6) 1부.

3. 물품변경계약서 1부.

4. 합의서(패키지에어컨)-감독관서명 1부.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박소현		행정관리과장	김성수		영등포아리수정수센터소장	05/21
전종원
협조자
시행	행정관리과-6459	(	2024. 5. 21.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로, 11 영등포아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	number0917@seoul.go.kr	/	부분공개(5)