문서번호	누수대응과-4947
결재일자	2024. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	누수대응과장	시설부장
김일구	장기덕	05/22
		전태호
협 조

서초 수도자재관리센터 건립 철거공사 설계용역

설계변경 검토 및 검토위원회 개최 계획

2024. 5.

서울아리수본부

(누수대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

서초 수도자재관리센터 건립 철거공사 설계용역 설계변경 검토 및 검토위원회 개최 계획
시설부	시설부장 : 전태호☎3146-1501 누수대응과장 : 장기덕☎1510 담당 : 김일구☎1517

「서초 수도자재관리센터 건립 철거공사 설계용역」관련, 건축물 해체 허가 심의 이행에 따른 설계변경 검토 및 검토위원회 개최 계획을 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

ㅇ 사 업 명 : 서초 수도자재관리센터 건립 철거공사 설계용역

ㅇ 용역기간 : 2024. 03. 26. ~ 05. 24.

ㅇ 계약금액 : 금 22,649,180원

ㅇ 계약업체 : 건축사무소QOA 대표 송자영

ㅇ 과업내용 : 지하1층/지상1층, 연면적 5,816㎡ 철거공사 설계

Ⅱ		설계변경 내용

□ 관련근거

ㅇ 건축물 해체 심의관련 검토보고(누수대응과-3872, 2024. 4. 15.)

ㅇ 서초구 해체전문위원회 심의의결서(서초구, 2024. 5. 10.)

□ 설계변경 사유

ㅇ 건축물 해체 허가 이행에 따른 추가 업무 수행

- 흙막이가시설 구조검토(구조계산서 포함) 및 설계

- 가시설(비계, 가설울타리) 구조검토(구조계산서 포함)

ㅇ 관사 철거에 따른 추가 업무 수행(강남 행정지원과-5937, 24.3.26)

- 강남수도사업소에서 우면산가압장 내 관사 철거키로 결정에 따라 관사 철거 설계 추가 시행(설계면적 증 270㎡)

□ 설계변경 내용

ㅇ 추가 업무에 이행에 따른 수량 변경

구 분	단 위	당 초	변 경	비 고
1. 철거공 설계용역	㎡	5,816	6,086
2. 흙막이 구조검토 및 설계	식	-	1
3. 비계 구조검토	식	-	1

ㅇ 계약금액 조정내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
	22,649	50,792	증 28,143
1. 철거공 설계용역	22,649	23,700	증 1,051
2. 흙막이 구조검토 및 설계	-	21,500	증 21,500
3. 비계 구조검토	-	5,592	증 5,592

□ 용역기간 연장

ㅇ 건축물 해체 허가 심의 이행에 따른 용역수행 기간 부족으로 6월 23일까지 준공기한 연장(30일)

구 분	당초	변경	비 고
용역기간	2024. 03. 26 ~ 2024. 05. 24	2024. 03. 26 ~ 2024. 06. 23

※ 서초구청과의 사전절차 처리와 협의 이행 등

Ⅲ		검토위원회 개최계획

ㅇ 대    상 : 서초 수도자재관리센터 건립 철거공사 설계용역

ㅇ 일    시 : 2024. 05. 22.(수) 10:00

ㅇ 장    소 : 4층 소회의실

ㅇ 심의내용 : 설계변경 적정성 검토

ㅇ 심의위원 구성

- 위 원 장 : 누수대응과장

- 위    원 : 시설6급 강정구, 제영도, 박종혁, 박상민

- 간    사 : 시설6급 김일구

Ⅳ		조치 계획

ㅇ 설계변경 검토위원회를 개최하여 설계변경 적정성 여부 등을 검토하고 결과에 따라 설계변경 시행

붙임 : 1. 설계변경 요청서 1부.

2. 요약보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 건축물 해체심의관련 검토보고 1부.

5. 해체전문위원회 심의의결서 1부.  끝.