문서번호	계획설계과-3827
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정2부시장 제95호

								시 민
주무관	계획설계과장		급수부장		서울아리수본부부본부장		서울아리수본부장		행정2부시장
홍원기	김근용		백광인		박진순		한영희		04/25
									유창수
협 조
	기술심사담당관					김창환

강북정수장 증설공사 유찰관련 공사수행방식 결정 등 세부 추진계획

강북정수장 증설공사 유찰관련

공사수행방식 결정 등 세부 추진계획

2024.  4월

서울아리수본부

(급   수   부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

강북정수장 증설공사 유찰관련

공사수행방식 결정 등 세부 추진계획

‘강북정수장 증설공사’의 조달청 입찰공고(3차) 결과 단독응찰(현대건설 컨소시엄)로 최종 ‘유찰’됨에 따라 공사수행방식 결정 등 세부 추진계획을 보고드림

Ⅰ
		현 황

□ 사업개요

ㅇ 목   적 : 암사정수장 현대화 등 노후 정수장 순환정비체계 구축

ㅇ 사 업 명 : 강북정수장 증설공사

ㅇ 사 업 비 : 2,578억원 (공사기간 53개월)

ㅇ 규    모 : 정수장 증설 25만㎥/일 (고도 95만㎥/일 → 120만㎥/일)

ㅇ 입찰방법 : 설계·시공 일괄입찰 (가중치 기준방식 설계 70%, 가격 30%)

- 설계·시공을 병행으로 공기 단축 가능, 하자발생 시 계약상대자의 책임소재 명확 및 설계변경 최소화로 예산절감 기대 등의 사유로 설계시공 일괄입찰 방식으로 추진

□ 추진경과

ㅇ '20.10. 28. : 아리수 정수센터 재건설 등 정비방안(부시장 방침 제284호)

ㅇ '24. 2.14. : (1차)입찰 공고 결과 ‘유찰’ (무응찰)

ㅇ '24. 3.11. : (2차)입찰 공고 결과 ‘유찰’ (현대건설 컨소시엄 단독응찰)

ㅇ '24. 3.13. : 강북정수장 증설공사 추진계획 검토보고(본부장 방침)

- 최근 자재비, 인건비 등 공사비 상승 부담과 건설경기 악화로 입찰 참여 부진

- ‘유찰 시 수의계약을 체결할 수 있다’는 문구 명시하여 입찰 재공고(3차)

ㅇ '24. 4. 9. : (3차)입찰 공고 결과 ‘유찰’ (현대건설 컨소시엄 단독응찰)

Ⅱ
		공사 계약방법 변경 검토

□ 공사수행방식 검토

	***************** *******	********* **********************
****	********************	***********
****	*************** ***************************************************************************************************************	**************** **************************************************************************************************************************
****	************************* ************************* *************************** ***********************	************************* ********************* ************************ ***************************

*****************************************

***********************************************

********************************************

****************************************************

*****************************************************

************************************************

****************************************************

공사수행방식 결정 등 종합 검토결과

***********************************

***********************************

*****************************************

****************************

Ⅲ
		설계시공 일괄입찰 수의계약 세부 추진계획

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ
		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항(협조사항)

**************

********************************************************

*************************************************************************************

*****************************************************

**************

*******************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ '24. 4. ~  5.  : 입찰참가자 계약절차 참여의사 확인, 입찰참가자격(PQ) 검토

ㅇ '24.  6. ~ 10.  : 기본설계․우선시공분 실시설계도서 작성 및 제출, 적격 심사

ㅇ '24.11. ~ 12. : 가격 검토 및 협상, 수의계약 및 착공(우선시공분)

*********************

*****************************

*************************