문서번호	정수시설과-4798
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
성민제	신왕근	代신왕근	05/24
			최철웅
협 조

『2023~2024년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기2차)』

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

2024. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『2023~2024년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기2차)』

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

광암아리수정수센터장:최철웅 ☎3146-5301  정수시설과장 :이재복 ☎5370  담당 : 성민제☎5383

우리 정수센터에서 시행중인『2023~2024년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사』자체 설계변경 심의위원회 개최 결과를 보고드림.

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 2023~2024년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사

ㅇ 계약기간 : 2024. 01. 08. ~ 2024. 05. 31.(2차년도)

******************************************

ㅇ 계약금액 : *****************

***************************

*****************************

ㅇ 계 약 자 : **************

□ 심의위원회 개요

ㅇ 일    시 : ********************

ㅇ 장    소 : 정수시설과 사무실

ㅇ 심의위원

**************

****************************************

ㅇ 심의내용

- 설계변경 타당성

- 공종별 물량변경에 따른 설계변경 적정성 여부

- 보험료 및 제경비 정산, 제비율 요율 산정 적정성 여부 등

ㅇ 계약금액 변경내용

구 분		공 사 비(원)
		당 초	변 경	증.감
총 계약금액		***********	***********	**********
1차년도 계약금액		***********	***********	*
2차년도 계약금액		**********	*********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	********
	계	***********	***********	**********

□ 심의결과 : 적정

ㅇ 내역 변경에 따른 보험료 정산 및 제비율 요율 산정 적정

□ 조치의견 : 심의결과에 따라 설계변경 및 변경계약 시행

ㅇ 계약금액 변경 : 감 6,966,500*

ㅇ 계약기간 : 변경없음

붙  임 : 1. 설계변경 심의위원회 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 서류(고용산재, 퇴직공제, 안전관리비) 1부.  끝.