문서번호	토목부-10348
결재일자	2024. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
송진수		代전용현	05/23
			이임섭
협조
	주무관		김경수

- 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -설계변경(전체 4회. 4차1회) 검토 보고

2024. 05.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -

설계변경(전체 4회, 4차 1회) 검토 보고

「성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 물가변동 반영 및 배치계획 조정 등 설계변경을 검토 후 보고 드림

※ 관련근거 : 건설사업-24-652호(2023.05.17.) "건설사업관리용역 설계변경 요청"

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명: 성산대교 본교 성능개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 공사규모: 성능개선 (DB18→DB24) ㅣ=880m

ㅇ 용역기간: '20.12.11.∼'25.12.10.(4차 '23.08.24.∼'24.06.04.)

ㅇ 용 역 비: **********************

ㅇ 계 약 자: *** 외 4개사

□ 설계변경 검토

ㅇ 설계변경 사유

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제4회) 반영

직전조정기준일 (기준시점)	조정기준일 (비교시점)	물가변동 경과일수	품목조정율	조정신청일	조정금액 (백만원)
2023.01.01.	2024.01.01.	365일	*****	**********	******

- 건설사업관리단 투입인원 조정계획(축소) 반영

· 공사대안 변경설계 중으로 예산의 효율적 집행을 위하여 공정추진 단계에 맞게 건설사업관리 기술인 투입 조정

※ 관련근거 : 도시기반시설본부-24-46712호(2023.02.06.)호 "건설사업관리기술인 투입인원 조정계획 검토결과 회신"

ㅇ 물가변동 반영 및 투입인원 조정에 따른 예산을 적용하여 4차 용역계약에 대해 기간연장

ㅇ 변경 내용

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
전 체 (4회)	용 역 비	**************	**************	***************
	용역기간	*******************	*******************	****
	투입인원	****************	****************	****
금 회 (4차1회)	용 역 비	************	************	****
	용역기간	*******************	*******************	**********
	투입인원	***************	***************	*****************

ㅇ 투입인원 변경 내용(4차)

***			*****					*****							**	**
			*	*	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*
* *	*** ****	**													****	*********************
		**													****	*********************
* *	*** ****	**													****	*********************
		**													****	*********************
	*** ****	**													****	*********************
		**													****	*********************
	*** ****	**													****	*********************
		**													****	*********************
	*** ****	**													****	*********************
		**													****	***
	*** ****	**													****	*********************
		**													****	*********************

□ 조치 계획

ㅇ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제4회) 및 공정추진에 따른 건설사업관리기술인 투입계획 조정 등을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함

붙임 : 1. 건설사업관리단 설계변경 검토서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.