아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	서울특별시 북부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 공사기간 연장 검토 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 관련문서

가. 재난관리과-3189(2024.5.16.)호 "미아119안전센터 앞 긴급출동신호제어시스템 교통신호기 설치공사 공사기간 연장에 따른 계약 변경 요청"

나. 북부도로사업소 기전과-4826(2024.5.2.)호 "교통안전시설물 원인자 부담공사 승인 통보[강북소방서 긴급출동신호제어시스템 교통신호기 설치공사]"

다. 재난관리과-2661(2024.4.24.)호 "교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 공사승인 요청"

3. 위와 관련 공사 시행중 아래와 같은 사유로 인해 당초 공사기간내 준공이 불가하여 공사기간을 연장 하고자 하오니 검토하여 주시기 바람니다.

가. 공 사 명: 긴급출동신호제어시스템 교통신호기 설치공사

나. 공사장소: 미아119안전센터 앞

다. 발 주 처: 강북소방서

라. 변경사유: 신호등주 관급자재의 조달청 등록지연

마. 변경내용

○ 공사 기간 연장

기 존	변 경
2024. 05. 02. ~ 2024. 06. 09.	2024. 05. 02. ~ 2024. 07. 31.

붙임  관련서류 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
소방교	박상민		대응총괄팀장	박종구		재난관리과장	05/24
차근철
협조자
시행	재난관리과-3371	(	2024. 5. 24.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	psm7796@seoul.go.kr	/	부분공개(5)