아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연장에 따른 변경계약 의뢰 (2023년 한강 취수장 주변 준설공사)

우리부서에서 추진중인 「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 의뢰합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

2. 계약기간 : 2023.8.17 ~ 2024.5.31

************************

***************************

6. 준공기한 연장

- 준공기한 : (당초) '23.8.17~'24.5.31 → (변경) '23.8.17 ~ '24.6.30.

- 지제상금 : 미부과 (귀책사유 : 미래한강본부)

7. 변경사유 : 사업계획 변경에 따른 준공기한 연장

붙임 : 1. 사업계획 변경 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서

3. 변경합의서 1부.  끝.

	치 수 과 장
주무관	박지수		치수과장	김창신		시설부장	05/23
이유국
협조자	주무관	장나영		기획예산과장	이강수		총무과장	김영창
시행	치수과-3915	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0696	/전송	02-3780-0744	/	cp8203@seoul.go.kr	/	부분공개(5)