아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	긴급출동 신호제어 시스템 교통신호기 설치공사 등 계약변경 알림

1. 재난관리과-3189(2024.5.16.)호『미아119안전센터 앞 긴급출동신호제어시스템 교통신호기 설치 공사 공사기간 연장에 따른 계약 변경 요청』와 관련 공사변경계약서를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 계 약 명 : 강북소방서 긴급출동신호제어시스템 정보통신공사 및 감리(2건)

나. 계약변경사항 : 공사기간 연장

- 변경전 : 감리 2024.4.18.~2024.6.16.  정보통신공사 2024.4.23.~2024.6.09.

- 변경후 : 감리 2024.4.18.~2024.7.31.  정보통신공사 2024.4.23.~2024.7.31.

다. 변경사유 : 2024년 변경된 규격의 신호등주 관급자재가 조달청 등록지연

라. 예산과목 : 소방차 통행로 환경개선 / 시설비(401-01)

붙임  1. 공사변경계약서(정보통신공사) 1부.

2. 공사변경계약서(감리) 1부.

3. 손해배상증권(감리) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
소방위	김석기		장비회계팀장	고주석		소방행정과장	05/23
손문범
협조자
시행	소방행정과-5448	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 4층 예방과 (번동)	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0192	/전송	02-6946-0183	/	natjrrl@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)