문서번호	토목부-10336
결재일자	2024. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승훈		김소연	05/23
			이임섭
협조

용역 설계변경(전체 5회, 3차 2회) 검토 보고

- 노들로 구조개선공사 외 1개소 통합건설사업관리용역 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 05.

도시기반시설본부

(토    목    부)

용역 설계변경(전체 5회, 3차 2회) 검토 보고

- 노들로 구조개선공사 외 1개소 통합건설사업관리용역 -

본 용역의 관리 사업인 ************************************ 용역준공기한 연기를 보고드림

Ⅰ		용 역 개 요

ㅇ 용 역 명 : 노들로 구조개선공사 외 1개소 통합건설사업관리용역

└ 관리사업 : 노들로 구조개선공사, 노들남북 고가차도 철거공사

ㅇ 용역기간 : ‘21.09.01.~’24.05.31(3차 : ‘23.07.01~’24.05.31)

ㅇ 용 역 비 : 2,682,660,000원(3차 : 939,720,000원)

ㅇ 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

Ⅱ		보 고 내 용

ㅇ 주요내용 : 총괄용역기간 연장 및 최종보고서 내역 이월

- 연장기한 : (당초)2024.05.31까지 → (변경)2024.12.31까지

- 내역조정 : 3차 용역에 포함된 최종보고서 제출건 다음 차수계약으로 이월

※ *****************************

ㅇ 연장사유 : ********************

- **********************

- **********************************************

※ ********************************

※ **************************************

ㅇ 용역 변경내용                                   (금액단위 : 원)

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 감리단 검토의견

- ********************************** 총괄용역기간 연장 및 최종보고서 제출을 추후 차수계약으로 이월하는 사항으로 변경계약을 요청함.

Ⅲ		조 치 계 획

ㅇ 설계변경 의뢰 및 3차 용역 준공 후 기술인 철수 지시

ㅇ ****************************************

붙임 : 설계변경 요청서 및 내역서 각 1부.  끝.