문서번호	급수운영과-9342
결재일자	2024. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
최형진	신정우	05/27
		채재일

『2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

2024. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

『2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최형진☎3642

우리사업소에서 시행하고 서울시설공단에서 감독중인『2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사』와 관련하여 현장 실정보고서 제출에 따른 검토보고 임.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: D500~600mm, L=1,180m

ㅇ 공사기간: 2023. 5. 4. ~ 2024. 6. 22.

ㅇ 계약금액: 1,281,374,000원

ㅇ 계약상대자: (주)이조건설 대표 이기수

□ 현    황

ㅇ 공사개요 : D500mm, L=20m 관로 갱생작업**********

- 위치도 및 현장사진

*****************************

※ 관련근거: 급수운영과-23935호(23.12.28.), 「공사 실정보고 회신」

- 하수BOX 상단에 매달려있는 상수도 배관의 세척갱생 공사에 대해 시공사 선정을 위해*************에 시공가능 여부를 확인한 결과, ************는 소규모 공사등에 따른 시공불가를 통보받았고 ******** 실제 시공비용 반영시 공사 가능함을 회신   받은 실정으로

- 시공 가능함을 통보받은 ******** 시공비용은 해당구간 20m의   공사비가 아닌 갱생공사 ************ 기준으로 산출된 공사비 ********* 지급을 요구 함.

· 시공사 협의 현황

************ ****	********	*******	*********	***
*****	*****	*******	*****
******	*	** *****	*
*****	******************	*********************	*********** **********

· 시공비 비교표

(단위: 천원)

연번	구분	적용	재료비	노무비	경비	합계	제경비 포함	비고
*	****	**************	*****	*****	***	*****	******	*** ****
*	************	****************	******	******	*****	******	******	*
*	***************	***************	******	******	*****	******	******	*
*	**** ****		******		*****	******	******	********

*************************************************************

□ 보고내용

ㅇ 시공 가능함을 통보받은********** 요구하는 실제공사비는  상기 공법 시방서에 의거한 *********** 적용 및 관 내부 녹제거 및 세척, 갱생(반전)시공 등 각 공정에 투입되는 장비 사용료등을 반영하여 산출한 금액으로, 장비 사용등에 따른   일일 시공량의 대가반영 요구는 적정한것으로 판단되며, 재료비는 해당 공사에 투입되는 비용을 산정함이 가하다고 사료됨.

ㅇ 또한, 갱생여부 판단을 위한 관 내부상태를 확인한 결과 상기 구간을 존치한 상태로 신관 부설 후 통수시 기존배관 노후로 혼탁수 발생이 불가피하여 안정적인 수질을 확보한 수돗물 공급이 어려울 것으로 판단 됨.

ㅇ 기존관 사진

********************************

□ 조치의견

ㅇ ********* 요구하는 실제공사비에 대하여 현장여건, 공법의 시공 방법등 종합적으로 검토한바 적정금액으로 판단되며, 상기 공사의 목적인 시민에게 안전하고, 안정적인 수돗물 공급을 위해서는 금번 공사시 하수BOX에 부설된 노후배관에 대한 갱생공사를 시행함이 가하다고 사료됨.

ㅇ 상기와 같은 실정으로********************* 갱생공사를 시행하고, 현장여건 및 시공사항등에 대하여 기록관리를 철저히 하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 향후계획

ㅇ 상기 보고내용에 따른 검토의견을 서울시설공단 및 (주)이조건설 대표 이기수에게 통보하여 시공 및  관리감독에 만전을 기하도록 지시하고, 추후 설계변경시 반영토록 통보코자 합니다.

붙임  서울시설공단 실정보고서 등 관련 서류 각 1부.  끝.