문서번호	급수운영과-7582
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
류태현		05/24
		이용구
협조

설계변경 및 차수별 계약금액 변경 검토 보고

[낙성대배수지(1지) 내부방식 공사]

2024. 5. 24

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 및 차수별 계약금액 변경 검토 보고

[낙성대배수지(1지) 내부방식 공사]

「낙성대배수지(1지) 내부방식 공사」시행중 설계변경 사항 및 차수별 계약물량 변동 사항이 발생하여 설계변경 및 차수별금액 변경을 실시하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 낙성대배수지(1지) 내부방식 공사

○ 공사개요 : 도막식 방수방식 4,923㎡, 패널식 방수방식 3,786㎡,

폼타이제거 단면보수 6,000개소, 콘크리트 단면 보수 40㎡

○ 공사기간 : 2023. 8. 3. ~ 2024. 5. 31(총차 : ~ 2024.6.30)

○ 도 급 비 : *******************************

○ 도 급 자 : ******************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사현장 상태와 설계서 상이 및 시공여건 변화에 따른 물량변동 발생

- 자재인양구 시공방법 변경, 임시전력 케이블 설치 및 철거 반영

- 내부누수 및 신축이음부 설치, 보수보강 물량 변동

- 집수정 덮개 구조물 철거 반영, 집진기 임대료 반영등

□ 설계변경 현황

○ 설계변경으로 인한 계약금액 및 차수별 금액 변경           (단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
도급비	총부기금액	*************	*************	************
	1차수 금액	***********	***********	*************
	2차수 금액	***********	***********	*************

○ 주요 물량 증 ․ 감

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
그라인딩(도막제거)	벽체, 도류벽, 기둥, 바닥	㎡	4,247	6,942	증) 2,695
그라인딩(도막제거)	천장	㎡	2,027	2,095	증) 68
폼타이제거 단면보수	T=30mm	개소	6,000	1,080	감) 4,920
콘크리트 단면복구	벽체,T=30mm	㎡	10	17	증) 7
콘크리트 균열보수	패커주입 공법	m	-	327	증) 327	신규

□ 조치의견

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경 및 차수별 금액변경 계약 추진

- 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여「설계변경 심의위원회」사전 심의를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 및 차수별금액 변경 계약을 추진 공사에 만전을 기하고자 함

따로붙임 : 1. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.