문서번호	방재시설부-6793
결재일자	2024. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	05/27
			이동훈
협 조

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 실정보고 검토(1차분)

2024. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 실정보고 검토(1차분)

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 잔여구간 건설폐기물 처리용역(1차분)」실정보고 사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 이산2024-국회대로(건)-150호(2024.5.24.)

1		공사개요

ㅇ 용 역 명 : 국회대로 지하차도(1단계) 건설폐기물 처리용역(잔여구간)

ㅇ 위    치 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 잔여구간

ㅇ 용역기간 : ‘23.1.4.~‘24.12.31.(1차 : ‘23.1.4.~‘24.5.31.)

ㅇ 용 역 비 : 금759,242,000원(일금칠억오천구백이십사만이천원정)
※ 1차 금460,870,000원

ㅇ 계 약 자 : (주) 진흥중공업

2		보고내용

ㅇ 변경사유

- 공정계획 상 폐기물 발생 순서에 따른 처리 및 정산

ㅇ 변경내용

구 분			변 경 현 황			비 고
			당초	변경	증(감)
**	**	*****	************	************	*****	******* ************
		****	***********	***********	*******
		*****	********	********	*
	**	*****	***********	***********	*****
		****	***********	***********	**********
**	**		************	************	*
	**		************	************	*
*********** ****			********************************** ****************************************

3		건설사업관리단 의견

ㅇ 폐기물 추가발생(중첩구간 아스팔트 절삭 및 재포장 등) 및 기 승인된 발생물량 변경으로 공정계획에 따라 발생되는 폐기물 종류가 변경되어 금회 정산 보고하는 사항임

4		보고자 의견

ㅇ 금액의 변경없이 공정진행 순서에 따라 발생하는 폐기물을 형상에 따라 수량 변경하여 실정보고한 사항으로, 건설사업관리단으로부터 제출된 변경된 폐기물의 수량산출서 및 내역서는 검토결과 적정하다고 판단됨.

ㅇ 금회 실정보고 사항에 대해서는 승인조치하고 추후 발생 종류에 관계없이 금액기준으로 처리 후 설계변경(처리량 정산) 시행코자 함.

붙임 1. 실정보고서 1부.

2. 폐기물 발생 변경위치 현황 1	부.  끝.