아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	변경계약체결[풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사] 보고 및 통보

1. 정수시설과-5692(2024.05.24.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약체결 되었음을 보고합니다(알려드립니다).

가. 건   명 : 풍납취수장 환경개선 전기설비 교체공사(장기2차)

나. 변경사유 : 설계변경 및 보험료등 정산

다. 계약업체 : (주)씨이앤아이

라. 변경내역

당 초			변 경
계약체결일	계약기간	계약금액(원)	변경계약 체 결 일	계약기간	계약금액(원)
2023.12.29.	2024.01.01.~ 2024.05.29	120,208,000 (총차 523,996,000)	2024.05.27.	2024.01.01.~ 2024.05.29	121,066,000 (총차 524,854,000)

붙임  1. [2024.4.1지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제282호) 1부.

2. 서울특별시 공사계약 특수조건 일부개정 전문(서울특별시예규 제734호)(2023.3.6) 1부.

3. 계약보증서(추가) 1부.

4. 공사변경계약서 1부.

5. 3. 변경내역서 1부.

6. 6. 합의각서 1부.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박소현		행정관리과장	김성수		영등포아리수정수센터소장	05/27
전종원
협조자
시행	행정관리과-6755	(	2024. 5. 27.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로, 11 영등포아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	number0917@seoul.go.kr	/	부분공개(5)