문서번호	기전과-5707
결재일자	2024. 5. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
이승주		代이승주	05/28
			김만호
협조

『23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)』

설계변경보고(최종)

2024. 5

기전과

『23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)』

설계변경보고(최종)

「23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」와 관련하여 공사

시행중 민원처리와 현장여건에 따른 물량 증·감과 신규공종 추가내역을

반영하여 최종 설계변경을 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 공사내용: 터널 및 지하차도 기전설비 유지보수

□ 계 약 자: ㈜중앙전설

□ 공사기간: ’23. 7. 1. ~ ‘24. 6. 30.

□ 계약금액: 605,942천원 (총차)

- 1차 준공 : 2023. 12. 11 (준공금액: 520,790천원)

- 2차 계약금액 :  85,151천원

Ⅱ		예산 집행내용

(단위:천원)

2차공사 계약금액	작업지시 차수별 작업금액			잔액
	6차	7차	계
85,151	62,700	22,451	85,151	-

Ⅲ		주요 작업내용

□ 월계1지하차도 가로등 배관철거 및 설치 - 노후

□ 월계1지하차도 보행로 등기구 교체 - 민원 사항

□ 인수봉로 지하차도 CCTV 전기배선 - 서울시 지시사항

Ⅳ		공사비 변경내용

(단위:천원)

	당 초	변 경	증·감	비 교
도급비(총차)	605,942	605,942	-
2차	85,151	85,151	-

Ⅴ		검토결과 및 처리의견

□ 공사 시행중 현장 여건 및 민원처리에 따른 물량 증·감 사항 발생과 내역변경

사항을 설계변경에 반영하여 기성처리(85,151천원)하고 최종준공 처리하고자

합니다.

붙임 : 변경내역서 1부.  끝.