문서번호	정수시설과-4841
결재일자	2024. 5. 27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
성민제	신왕근	05/27
		代신왕근
협 조

토목건축시설물 유지보수 및 관사 환경정비 공사 건설재해예방기술지도 용역

설계변경 사항 보고(2차)

2024. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

토목건축시설물 유지보수 및 관사 환경정비 공사

건설재해예방기술지도 용역 설계변경 사항 보고(2차)

정수시설과장 :이재복 ☎3146-5370  안전관리팀장 : 신왕근 ☎5382 담당 : 성민제☎5383

"토목건축시설물 유지보수 공사" 및 "관사 환경정비 공사" 건설재해예방기술지도 용역 시행중 기술지도 횟수 변동사항이 발생하여 설계변경 시행코자 함.

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 토목건축시설물 유지보수 및 관사 환경정비 공사

건설재해예방기술지도 용역

ㅇ 용역기간 : 2023. 04. 11. ~ 2024. 05. 31.

- 1차년도(2023년) : 2023. 04. 11. ~ 2023. 12. 31.

- 2차년도(2024년) : 2024. 01. 01. ~ 2024. 05. 31.

ㅇ 용역내용 : 건설재해예방기술지도 월2회 실시

ㅇ 용 역 비 :************************

ㅇ 공사업체 : ***************

□ 변경사유 및 변경 내역

ㅇ 변경사유

**********************************

************************************************

ㅇ 변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총공사비		**********	**********	************
1차년도(2023년)		**********	**********	*
2차년도(2024년)		**********	********	************
도급비	공급가액	**********	**********	************
	부가가치세	********	********	************
	계	**********	**********	************

□ 조치의견

ㅇ 상기 변경내역에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 타당성 및

적정성 심의

ㅇ 심의위원회 심의결과를 반영하여 설계변경 금액 확정 및 실시

□ 자체 설계변경 심의위원회 개최

ㅇ 개최일시 : 2024. 05. 27(월) 11:00 ~

ㅇ 개최장소 : 정수시설과 사무실

ㅇ 심의방법 : 서면심의

ㅇ 심의위원 : 위원장(정수시설과장)

위  원(김현철, 류근필, 박성신)

ㅇ 주요 심의내용

- 설계변경 타당성

- 기술지도 용역 횟수 적정성

□ 향후 계획

ㅇ 설계변경 및 변경 계약 체결

ㅇ 용역 준공 시행

붙  임 1. 설계변경 의뢰서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 의견서 양식 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 결과보고서 각 1부.  끝.