문서번호	교량안전과-9687
결재일자	2024. 5. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
신영귀		代신영귀	05/27
			김동철
협조

「한강교량 보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」

건설사업관리기술인 배치계획 조정 검토 보고

2024. 5.

교 량 안 전 과

(교량관리팀)

「한강교량 보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」

건설사업관리기술인 배치계획 조정 검토 보고

'한강교량 보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역'의 건설사업관리기술인 배치계획 조정 요청에 대한 검토 결과 보고임.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 한강교량 보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 용역기간 : (전체) 2023. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.

(2차) 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

○ 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사 외 2

○ 계약금액 : *******************************
**************************

□ 검토 내용

○ 관련근거 : 토목감리부-24-274호(2024. 5. 27.)

○ 요청내용 : 건설사업관리기술인 배치계획 조정 승인 요청

□ 검토 결과

○ 검토근거 :「용역계약 일반조건」 제45조(건설사업관리용역의 착수 및 보고)

○ 검토사항 : 건설사업관리기술인 배치계획 변경

- 변경 사유 : 5~7월 포장공사(야간) 집중에 따라 원활한 감리업무 수행을 위한 감리원 배치기간 조정 및 야간 감리원 추가 투입(2월)

- 변경 사항(투입기간)

⦁중급 분야별건설사업관리기술인(토목,전기, 철도) : 10월 → 8월(감 2월)

⦁초급 분야별건설사업관리기술인(토목)           :  9월 → 9.45월(증 0.45월)

⦁중급 분야별건설사업관리기술인(토목, 도장)      :  9월 → 9.59월(증 0.59월)

⦁초급 분야별건설사업관리기술인(추가 투입)      :  0월 → 2월(증 2월)

- 예산 사항 : 변경 없음

○ 추가 투입 건설기술자 평가 및 검토결과: 적정

분 야	소속	성명	기술자격		투입일	비고
			등 급	검토결과
****** ****	*****	*** **********	****	**	**********	****
	*****	*** **********	****	**	**********	****

□ 조치계획

○ 상기와 같이 건설사업관리기술인 배치 계획 변경에 대하여 검토한 결과 용역사 요청사항이 적정하므로 원활한 건설사업관리 업무 수행을 위해 승인통보하여 용역 수행에 철저를 기하고자 함.

붙임  관련 문서 1부.