아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰 [2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리용역]

우리 본부에서 추진중인「2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차1회, 2차1회)을 시행하고 계약의뢰 합니다.

1. 용 역 명 : 2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리용역

2. 계약기간 : 총차 2023.9.4. ~ 2024.5.31. (2차 2024.1.12. ~ 2024.7.15.)

******************************************

*****************************

5. 준공기한 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2023.09.04 ~ 2024.05.31	2023.09.04 ~ 2024.07.15	증) 1.5개월
2 차	2024.01.12 ~ 2024.05.31	2024.01.12 ~ 2024.07.15	증) 1.5개월

6. 계약금액 변경                                                 (단위:원)

구 분		총 차(1회)			2차(1회)
		당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
****		***********	***********	*************	***********	***********	*************
***	****	***********	***********	*************	***********	***********	*************
	*****	**********	**********	*************	**********	**********	*************
	***	***********	***********	*************	***********	***********	*************

6. 변경사유 : 사업계획 변경에 따른 건설사업기술인 투입인력 조정 및 공기연장

7. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강 하천시설 관리, 한강 저수로 정비, 시설비 및 부대비, 감리비(본 예산 65,344,000원)

붙임 : 1. 관련 보고서 1부.

2. 변경 내역서(총차1회, 2차1회) 각 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 변경 합의서 1부.  끝.

	치 수 과 장
주무관	박지수		치수과장	김창신		시설부장	05/27
이유국
협조자	주무관	강혜민		기획예산과장	이강수		총무과장	김영창
시행	치수과-3934	(	2024. 5. 27.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0696	/전송	02-3780-0744	/	cp8203@seoul.go.kr	/	부분공개(5)