문서번호	정수시설과-4862
결재일자	2024. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
성민제	05/27
	代신왕근
협 조

토목건축시설물 유지보수 및 관사 환경정비 공사 건설재해예방기술지도 용역

설계변경(2차) 심의위원회 개최 결과 보고

2024. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

토목건축시설물 유지보수 및 관사 환경정비 공사 건설재해예방기술지도 용역

설계변경(2차) 심의위원회 개최 결과 보고

정수시설과장:이재복 ☎3146-5370  안전관리팀장 :신왕근 ☎5382 담당:성민제 ☎5383

우리 정수센터에서 시행중인『토목건축시설물 유지보수 및 관사 환경정비 공사 건설재해예방기술지도 용역』자체 설계변경 심의위원회 개최 결과를 보고드림.

□ 사업개요

ㅇ 용 역 명 : 토목건축시설물 유지보수 및 관사 환경정비 공사

건설재해예방기술지도 용역

ㅇ 용역기간 : 2023. 04. 11. ~ 2024. 05. 31.

- 1차년도(2023년) : 2023. 04. 11. ~ 2023. 12. 31.

- 2차년도(2024년) : 2024. 01. 01. ~ 2024. 05. 31.

ㅇ 용역내용 : 건설재해예방기술지도 월2회 실시

ㅇ 용 역 비 : 6,688,000원(금육백육십팔만판천원원)

ㅇ 용역업체 : 바로안전컨설턴트 대표 은희우

□ 심의위원회 개요

ㅇ 일    시 : 2024. 05. 27.(월)  11:00

ㅇ 장    소 : 정수시설과 사무실

ㅇ 심의위원

**************

****************************************

ㅇ 심의내용

- 설계변경의 타당성 여부

- 기술지도 횟수 변경에 따른 설계변경 적정성 여부

ㅇ 계약금액 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총공사비		**********	**********	************
1차년도(2023년)		**********	**********	*
2차년도(2024년)		**********	********	************
도급비	공급가액	**********	**********	************
	부가가치세	********	********	************
	계	**********	**********	************

□ 심의결과 : 적정

□ 조치의견 : 심의결과에 따라 설계변경 및 변경계약 시행

ㅇ  계약금액 변경 : ***********

ㅇ  계약기간 : 변경없음

붙  임 : 1. 설계변경 심의위원회 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.