문서번호	급수운영과-7780
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	05/29
			代김윤환
협조

설계변경 심의 결과보고(2차) 2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 05. 29. (수)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과보고(2회)

[2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(단가계약)]

「2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(단가계약)」 업무 수행 중 현장 여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감에 대한 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(단가계약)

ㅇ 공사개요 : 제수변 정비 294개소, 변실정비 145개소

ㅇ 공사기간 : 2023. 6. 8. ~ 2024. 5. 31.

ㅇ 도 급 자 : 율토건설(주)   대표자 최연순

ㅇ 도 급 액 : 금980,050,330원

□ 설계변경 심의 시행

○ 심의기관 : 서울아리수본부 안전조사과

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증, 감 사항 심의

○ 관련근거 : 안전조사과-5351(2024.5.29) 계약금액조정 결과통보

※ 도급액 증가(4.7%)로 인한 심의 요청 (2024.5.24)

□ 설계변경 검토 내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 계약 변동물량 계약단가 적정여부 : 적정

○ 제잡비 적정산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반사항 준수 여부 : 준수

□ 설계변경 심사 현황

○ 당초 설계변경 내용

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
도 급 액	980,050,330	1,026,564,000	증 46,513,670

○ 심사 결과

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
도 급 액	980,050,330	1,025,913,000	증 45,862,670	-651,000

○ 검토내용 : 시공물량 증 · 감에 따른 계약물량 조정

- 고용개선 장려금 제외 (감 651,000원)

□ 설계변경 금액 : 증 45,862,670 (본부 심사에 의거)

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공사 원가	890,954,846	932,648,182	증 41,693,336
부가가치세	89,095,484	93,264,818	증 4,169,334
도 급 비	980,050,330	1,025,913,000	증 45,862,670

□ 설계변경 세부내용

○ 주요공종 물량 증가내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트 포장절단	200mm 이하	m	672	1,355	증) 1,585,243
인력터파기	견질토사 0-1m	㎥	39	119	증) 2,891,040
주철(이형관) 부설공	80mm	개소	102	168	증) 2,553,210
원형밸브설치공 (기초재활용플라스틱)	80mm	개소	15	27	증) 5,455,092
PE휀스 설치 및 철거	-	m	465	1,387	증) 1,351,652

○ 주요공종 물량 감소내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
아스팔트깨기	소형브레이커	㎥	50	-	감) 4,622,150
인력터파기(협소, 지장물)	견질토사0-1m	㎥	48	-	감) 2,601,936
KP이탈방지압륜	100mm	개소	120	20	감) 2,852,700
제수밸브 부설 및 접합공	200mm	개소	21	8	감) 1,182,649
단수안내홍보비	40가구 기준	회	83	69	감) 551,656

○ 주요 신규공종 발생내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
잔토처리	현장처리	㎥	-	292	증) 1,403,060
탄소섬유 내진보강 (법원가압장)	내진보강	식	-	55	증) 23,876,106
금천배수지 환경정비	항 출입구 나무테크 보수	개소	-	3	증) 3,947,417
크레인	70톤	hr	-	6	증) 1,228,416
제수밸브 철거공	150mm 기계	개소	-	3	증) 99,408

□ 조치계획

○ 본부 안전조사과 설계변경 심의가 완료되었기에 결과를 반영하여  설계변경 시행코자 합니다.

붙임 : 1) 설계변경 검토보고 1부.

2) 계약금액 조정 결과 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.

4) 계약금액 검증확인서 1부.  끝.