아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 및 차수별 계약금액 변경 계약 의뢰 [낙성대배수지(1지) 내부방식공사]

1. 우리사업소에서 시행중인『낙성대배수지(1지) 내부방식 공사』에 대하여 설계     변경 심의위원회 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 및 차수별 계약금액      변경을 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 낙성대배수지(1지) 내부방식 공사

나. 공사개요 : 도막식 방수방식 4,923㎡, 패널식 방수방식 3,786㎡,

폼타이제거 단면보수 6,000개소, 콘크리트 단면 보수 40㎡

다. 공사기간 : 2023. 8. 3. ~ 2024. 5. 31(총차 : ~ 2024.6.30)

라. 도 급 비 : *******************************

마. 도 급 자 : ******************

바. 설계변경 및 차수별 계약금액 변경                            (단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
도급비	총부기금액	*************	*************	************
	1차수 금액	***********	***********	*************
	2차수 금액	***********	***********	*************

사. 설계변경 사유

- 공사현장 상태와 설계서 상이 및 시공여건 변화에 따른 물량변동

아. 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물 관리 최적화,

배수지 내부방식, 수선유지비(배급수비)

붙임 : 설계변경 및 차수별 계약금액 변경 시행 및 관련서류 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
급수관리팀장	류태현		급수운영과장	05/28
이용구
협조자
시행	급수운영과-7746	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길, 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(7)