아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 및 차수별 계약금액 변경 시행 [낙성대배수지(1지) 내부방식공사]

1. 우리사업소에서 시행중인『낙성대배수지(1지) 내부방식 공사』에 대하여 설계     변경 심의위원회 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 및 차수별 계약금액      변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 낙성대배수지(1지) 내부방식 공사

나. 공사개요 : 도막식 방수방식 4,923㎡, 패널식 방수방식 3,786㎡,

폼타이제거 단면보수 6,000개소, 콘크리트 단면 보수 40㎡

다. 공사기간 : 2023. 8. 3. ~ 2024. 5. 31(총차 : ~ 2024.6.30)

라. 도 급 비 : *******************************

마. 도 급 자 : ******************

바. 설계변경 및 차수별 계약금액 변경                            (단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
도급비	총부기금액	*************	*************	************
	1차수 금액	***********	***********	*************
	2차수 금액	***********	***********	*************

사. 설계변경 사유

- 공사현장 상태와 설계서 상이 및 시공여건 변화에 따른 물량변동

아. 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물 관리 최적화,

배수지 내부방식, 수선유지비(배급수비)

따로붙임  1. 설계변경 심의 결과보고 1부.

2. 설계변경 사전 심의 요청서 1부.

3. 설계변경 사전 심의 의결서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.

5. 합의서 1부.  끝

급수관리팀장	류태현		주무관	김은희		급수운영과장	이용구		남부수도사업소장	05/28
김정선
협조자	주무관	박종배
시행	급수운영과-7739	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길, 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(7)