문서번호	기전과-6846
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
이동열		代김진종	05/30
			손경철
협 조

「남산1호터널 자동화재탐지설비 개선사업 」추진계획

「남산1호터널 자동화재탐지 설비 개선 」 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

서부도로사업소

(기  전  과)

「남산1호터널 자동화재탐지 설비 개선 」

추 진 계 획

우리사업소에서 관리하고 있는 남산1호터널의 노후된 자동화재탐지설비를 개선하여 안전한 소방체계 구축하기 위한 계획을 아래와 같이 보고함

Ⅰ		추 진 개 요

□「도로터널 방재 · 환기시설 설치 및 관리지침」

[국토교통부 예규 제383호, 2024. 4. 5. 일부개정]

□ 도로기전분야 예산편성 및 신속집행 철저

[도로시설과-358, 2024. 1. 8.]

Ⅱ		시설물 현황

위치	시설명	설치연도	개선대상	비 고
남산1호터널	선형화재감지기 수신반	1994년(추정)	○
	R형 복합화재수신반	2012년	○

□ 시설물 사진

선형화재감지기 수신반	R형 복합화재수신반

Ⅲ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 남산1호터널 자동화재탐지설비 개선

□ 위    치 : 남산1호터널 필동관리사무소

□ 사업목적 : 기설치된 자동화재탐지설비의 노후에 따른 설비 교체로 화재 재해 예방

□ 사업예산 : 259백만원

○ 선형화재감지기 수신반 구매

- 사 업 비 : 109백만원

- 주요내용 : 단종된 선형화재감지기 수신반 교체

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 사업기간 : 2024. 6. ~ 9.

○ R형 복합화재수신반 개선

- 사 업 비 : 150백만원

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 주요내용 : R형수신반 및 중계기 등 부대설비 교체

- 사업기간 : 2024. 6. ~ 9.

○ 예산과목 : 도로시설과,도로시설관리,기전시설물관리(도시개발특별회계), 도로기전시설물 일상유지보수,시설비및부대비,시설비

Ⅳ		사전심의 검토

□ 특정기술 선정심사 : 해당없음

○ 제한경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 경우

□ 계약심사 : 심사대상

○ 2천만원 이상 물품의 제조·구매

□ 일상감사 : 해당없음

○ 5억원 미만의 물품의 제조·구매

Ⅴ		향 후 계 획

○ 2024. 6. : 계약심사 및 계약의뢰

○ 2024. 6. ~ 9. : 물품 납품 및 설치

○ 2024. 9. : 사업준공  끝.