문서번호	방재시설부-6953
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	05/29
			이동훈
협 조

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 설계변경[총차 1회, 1차 1회] 검토 보고

2024. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 설계변경[총차 1회, 1차 1회] 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 잔여구간」건설폐기물 처리용역 (총차1회, 1차 1회) 처리량 정산에 따른 설계변경에 대한 검토보고 임

※ 관련근거 : 이산(S)2024-국회대로(건)-154호(2024.5.28.)

1		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 국회대로 지하차도(1단계) 건설폐기물 처리용역(잔여구간)

ㅇ 위    치 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 잔여구간

ㅇ 용역기간 : ‘23.1.4.~‘24.12.31.(1차 : ‘23.1.4.~‘24.5.31.)

ㅇ 용 역 비 : 금759,242,000원(일금칠억오천구백이십사만이천원정)
※ 1차 금460,870,000원

ㅇ 계 약 자 : (주)진흥중공업

2		보고내용

ㅇ 설계변경(총차, 1차) 사유

- 금회(1차분)분은 물량대체 실정보고(방재시설부-6793(2024.5.27.))사항을 설계변경에 정산 반영함

ㅇ 계약기간 및 계약금액 조정

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
** **	**	*************** ****************	*************** ******************	*	*********
	**	**************** *****************	**************** *****************	*
** **	**	************	************	*	******
	**	************	************	*

ㅇ 수량 변경내용

구 분			변 경 현 황			비 고
			당초	변경	증 · 감
**	**	*****	*********	*********	********
		****	********	********	*********
		*****	*****	*****	*
	**	*****	********	********	********
		****	********	********	*********

3		책임건설사업관리기술인 검토의견

ㅇ 건설폐기물(폐콘크리트, 폐아스콘) 처리물량에 대해 검토한 결과 적합한 것으로 사료됨

4		보고자 의견

ㅇ 지난 ’24.5.27. 실정보고한 사항의(금액 변경없이 폐기물을 형상에 따라 수량변경) 처리량 정산으로 물량이 최종 처리되어 설계변경함은 적정하다고 판단되는 바, 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 건설폐기물 처리용역 설계변경(총차 1회, 1차 1회) 검토보고 1부.  끝.