아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사)- 2회

우리사업소에서 시행중인 『2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사』에 대하여 설계변경 계약금액조정을 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(장기계속 단가계약)

나. 계 약 자 : 율토건설㈜  대표자 최연순

다. 공사기간 : 2023. 6. 8. ~ 2024. 5. 31.

라. 공사개요 : 제수변 정비 294개소, 변실정비 145개소

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
공사 원가	890,954,846	932,648,182
부가가치세	89,095,484	93,264,818
도 급 비	980,050,330	1,025,913,000	증 45,862,670

바. 설계변경 사유 : 신규공종 및 공종별 물량 증,감 발생

사. 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 맑은물길 조성, 노후밸브정비, 구축물, 시설비(밸브교체)

시설물관리최적화, 배수지 아리수올림터유지보수, 수선유지비(아리수올림터 배수지환경정비)

소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설등의 설치 및 보수, 시설비

붙임  설계변경 관련문서 각 1부.  끝.

주무관	서장원		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	代김윤환		남부수도사업소장	05/30
김정선
협조자	주무관	박종배		행정지원과장	홍기관
시행	급수운영과-7821	(	2024. 5. 30.	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4562	/전송	02-3146-4589	/	sjangwon@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)