아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2023년 관악 금천구 관내 상수도 시설물공사)

우리사업소에서 시행중인 『2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사』에 대하여 설계변경 계약금액조정을 완료하고 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(장기계속 단가계약)

나. 계 약 자 : 율토건설㈜  대표자 최연순

다. 공사기간 : 2023. 6. 8. ~ 2024. 5. 31.

라. 공사개요 : 제수변 정비 294개소, 변실정비 145개소

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
공사 원가	890,954,846	932,648,182
부가가치세	89,095,484	93,264,818
도 급 비	980,050,330	1,025,913,000	증 45,862,670

바. 설계변경 사유 : 신규공종 및 공종별 물량 증,감 발생

사. 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 맑은물길 조성, 노후밸브정비, 구축물, 시설비(밸브교체)

시설물관리최적화, 배수지 아리수올림터유지보수, 수선유지비(아리수올림터 배수지환경정비)

소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설등의 설치 및 보수, 시설비

붙임  설계변경 관련문서 각 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	서장원		급수관리팀장	代서장원		급수운영과장	05/30
이용구
협조자
시행	급수운영과-7830	(	2024. 5. 30.	)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4562	/전송	02-3146-4589	/	sjangwon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)