문서번호	영동대로복합개발추진단-5582
결재일자	2024. 5. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		복합개발토목과장	영동대로복합개발추진단장
손현정		이승우	05/31
			代이재혁
협조

휴일(토,공휴일) 작업계획(2024년 6월)  검토보고(영동대로 3공구)

- 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목) -

휴일(토, 공휴일) 작업계획('24년 6월) 검토 보고

2024. 5.

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

- 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목) -

휴일(토, 공휴일) 작업계획('24년 6월) 검토 보고

「영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목)」관련 2024년 6월 휴일(토요일, 공휴일) 작업계획 승인 요청에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련서류 : 영동3감 제2024-220호(2024. 05. 31.)

□ 관련근거

ㅇ 입찰안내서 공사계약 특수조건Ⅱ 제52조(휴일 및 야간작업)

ㅇ 건설사업관리용역 과업내용서 제2장 6.3 ‘휴일 및 야간근무 등에 대한 건설사업관리대가 지급’

□ 휴일(토, 공휴일) 작업계획

ㅇ 작업사유

- 본선구간 토공 및 가시설 적정 공정관리를 위한 휴일작업 시행

ㅇ 작업내용

- 본선 중앙부 작업장 토공 굴착(반출)작업 및 가시설 설치 등

ㅇ 작업 세부내용

작업 일시	구 분	작업 위치	작업 내용	비고
6. 01.(토) (07:00~17:00)	휴일 (주간)	중앙부 작업장	· 작업구 설치 및 본선 토공작업 · 기타 토공 및 부대작업
6. 06.(목) (07:00~17:00)	공휴일 (주간)	중앙부 작업장	· 작업구 설치 및 본선 토공작업 · 기타 토공 및 부대작업 - 상수도관 철거 및 통신, 한전관로 터파기 및 매달기
6. 08.(토) (07:00~17:00)	휴일 (주간)	중앙부 작업장	· 작업구 설치 및 본선 토공작업 · 기타 토공 및 부대작업 - 상수도관 철거 및 통신, 한전관로 터파기 및 매달기

작업 일시	구 분	작업 위치	작업 내용	비고
6. 15.(토) (07:00 ~ 17:00)	휴일 (주간)	중앙부 작업장	· 작업구 설치 및 본선 토공작업 · 기타 토공 및 부대작업 - 상수도관 철거 및 통신, 한전관로 터파기 및 매달기
6. 22.(토) (07:00 ~ 17:00)	휴일 (주간)	중앙부 작업장	· 본선 토공작업 · 기타 토공 및 부대작업 - 상수도관 철거 및 통신, 한전관로 터파기 및 매달기
6. 29.(토) (07:00 ~ 17:00)	휴일 (주간)	중앙부 작업장	· 본선 토공작업 · 기타 토공 및 부대작업 - 상수도관 철거 및 통신, 한전관로 터파기 및 매달기

ㅇ 감리단 근무계획 및 대체휴무 계획

- 평일 조출근무자는 16시 퇴근하며, 평일 야간근무자는 주간근무자가 직무

대행 및 공휴일 야간근무자는 별도 대체휴무 없음

- 휴일(토요일) 주간근무는 대체휴무 부여, 야간 근무는 출퇴근 시간 조정을

통한 탄력근무 실시

근무일자	구분	근무자	대체 휴무계획		비고
			대체 휴무일	업무대행자
’24. 6. 01.(토)	휴일	***	’24. 6. 03.(월)	***
’24. 6. 08.(토)	휴일	***	’24. 6. 10.(월)	***
’24. 6. 15.(토)	휴일	***	’24. 6. 17.(월)	***
’24. 6. 22.(토)	휴일	***	’24. 6. 24.(월)	***
’24. 6. 29.(토)	휴일	***	’24. 7. 01.(월)	***

	승 인 조 건
◦ 작업 시 시공사 현장책임자는 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시 안전 관리자를 포함하여 근무하도록 하여 안전사고예방 관리 철저 ◦ 중대재해처벌법 시행에 따라 산업재해 예방을 위한 자율점검표, 산재예방 매뉴얼 등을 적극 활용하여 先안전, 後작업 이행 철저 ◦ 위험성평가 실시 후 위험성 감소대책 이행 철저 ◦ 근로자 보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대 항목을 준수하고 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고 ◦ 작업 시 신호수 배치 및 통행로 확보를 철저히 하여 시민 불편사항 최소화 ◦ 화재예방을 위해 지정장소 외 흡연금지, 위험물 보관소 및 가스용기 관리 철저 ◦ 건설기계·장비 또는 중량물 취급 작업 시 건설사업관리 기술자 확인 및 안전수칙 준수 철저 ◦ 폭우 등 재난 대비 관련 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리 철저

□ 조치계획

ㅇ 상기 내용의 검토 결과 현장의 원활한 공정 관리를 위해 건설사업관리단에서 제출한 2024년 6월 휴일(토, 공휴일) 작업계획은 적정한 것으로 판단되므로 승인 처리하고, 변경사항 발생 시 사전보고 후 시행토록 조치하고자 함.

붙임 1. 영동3감 제2024-220호 2024년 6월 휴일(토요일,공휴일)작업 승인요청(2024.05.31) 1부.  끝.