아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(24.6월 휴일 및 야간 작업계획 승인 알림)

1.업무지시현장 : 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목) 현장

2.작 성 일 자 : 2024-05-31 16:05:30

3.지 시 내 용

가. 대한(영동) 제24-143(2024.05.31.)호와 관련임.

나. ‘영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)’와 관련 휴일 및 야간 작업계획('24.6월)에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 건설사업관리단과 시공사에서는 승인조건을 준수하면서 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1) 귀책사유 : 시공사

2) 휴일 및 야간 작업계획('24.6월)

일 시	구 분	작업위치	작업내용	비 고
6. 1.(토요일) 6. 6.(현충일) 6. 8.(토요일) 6.15.(토요일) 6.22.(토요일) 6.29.(토요일)	토요일 및 공휴일 (07~18시)	복합환승센터	- 토공 굴착 및 반출 - 1단 가시설 제작 및 설치 - 진입부 복공 거푸집 설치
		아셈측	- 토공정지 현장 정리정돈
		아이파크측	- 하수박스 되메우기
		북측 연결통로	- 토공 굴착 및 소운반
		본선터널	- 터널 굴착 및 천공 - S/C타설, 보강작업
6. 3. ~ 6. 8. 6.10. ~ 6.15. 6.17. ~ 6.22. 6.24. ~ 6.29.	연 장 (19~22시) 야 간 (22~06시)	본선터널	- 터널 굴착 및 천공 - S/C타설, 보강작업
6. 4., 6.10.	야 간 (22~06시)	북측 연결통로	- 하수박스 설치
6.20. ~ 6.22., 6.24.	야 간 (22~06시)	전력구 출입구	- 7호선 배전관로 풀링

3) 승인조건

ㅇ 작업 시 시공사 현장책임자는 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시 안전 관리자를 포함하여 근무하도록 하여 안전사고예방 관리 철저

ㅇ 중대재해처벌법 시행에 따라 산업재해 예방을 위한 자율점검표, 산재예방 매뉴얼 등을 적극 활용하여 先안전, 後작업 이행 철저

ㅇ 위험성평가 실시 후 위험성 감소대책 이행 철저

ㅇ 근로자 보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대 항목을 준수하고 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고

ㅇ 작업 시 신호수 배치 및 통행로 확보를 철저히 하여 시민 불편사항 최소화

ㅇ 화재예방을 위해 지정장소 외 흡연금지, 위험물 보관소 및 가스용기 관리 철저

ㅇ 건설기계·장비 또는 중량물 취급 작업 시 건설사업관리 기술자 확인 및 안전수칙 준수 철저

ㅇ 폭우 및 강풍 등 재난으로 인한 안전사고 발생하지 않도록 현장관리 철저.  끝.

주무관	이성열		복합개발토목과장	05/31
이승우
협조자
시행	영동대로복합개발추진단-5576	(	2024. 5. 31.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 3층 (무교동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2821	/전송	02-6438-2805	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)