문서번호	토목부-11015
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
도제경		김소연	06/03
			代박운용
협 조
	주무관			정해유
	주무관			정성호
	주무관			전희선
	주무관			송석범

「당산역 도시고속도로 환승정류장 신설」

품질점검단 구성 및 운영계획

2024. 06.

도시기반시설본부

(토    목    부)

「당산역 도시고속도로 환승정류장 신설」

품질점검단 구성 및 운영계획

공사 준공 전 시설물에 대한 전문가와 시민들이 직접참여하는 품질 점검단을 구성하고, 시민의 눈높이에서 점검을 시행하여 시민들이 안심하고 시설물을 이용할 수 있도록 하고자 함.

□ 추진배경

ㅇ 서울시 건설혁신 방안[도로계획과-24410('22.7.6.)호, 부시장방침]

ㅇ 도기본 공사장 "품질점검단 구성 및 운영" 추진 요청[토목부-15998('23.8.29.)]

□ 점검내용

ㅇ (점검내용)시설물 마감 상태, 시민 안전 위해요소 등 전반적인 시공실태 점검 등

ㅇ (점검대상)토목(조경 포함) 전기 全분야

□ 품질점검단 구성(안)

ㅇ 품질점검단 구성 방법

- (외부전문가)市 건설기술심의위원 전문가 명단 등에서 분야별 선정

- (시      민)인근지역 주민센터 추천(영등포구 당산2동 등)

※ 분야별 1명씩 추천 받되, 추천인이 적을 경우 총 1명으로 적용예정

- (관 계 부 서)사업주관부서(1명), 유지관리부서 등 직원(4명)

※ 점검 시 혼잡을 방지하고자 외부전문가 및 유지관리부서에 대한 품질점검은 '24.6.4.(화)에 시행예정인 예비준공검사 합동점검으로 갈음예정

ㅇ 분야별 인원 구성(안)

구 분	외부전문가	시 민	관계부서	계
토 목	2 (토목1, 기계1)	1	4	7
전 기	1	1	1	3
계	3	2	5	10

□ 품질점검단 운영

ㅇ 운영시기: '24.6.10.~14. 중 시행(현장 여건 및 기상 조건에 따라 탄력적 시행예정)

ㅇ 운영방법: 분야별로 점검 시기를 지정·협의하여 점검 시행

① 품질점검단 구성 (전체 점검단 모집․선정)		② 품질점검 시행 (점검일 지정 및 시행)		③ 지적사항 조치 (시정조치, 정비계획 수립 등)		④ 조치결과 수합 (품질점검단 운영결과 정리)
토목부		분야별 각 부서		분야별 각 부서		토목부

※ 분야별 해당 부서에서 점검일 협의 후 시행

□ 점검결과 조치

ㅇ 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 정비 조치

ㅇ 주요 지적사항은 시공계획서 등 수립하여 정비 시행

(필요한 경우 조치 완료 시까지 준공기한 연기)

□ 행정사항

ㅇ 전문가 품질점검 수당 지급

- 예산확보: 사업주관부서(교통운영과)에 시설부대비 등 예산 재배정 요청

- 지급대상: 외부전문가 3명(토목 1명, 기계 1명, 전기 1명)

- 소요예산: 3명×1회×200,000원(4시간이상) = 600,000원

※ 점검 시간에 따라 소요예산 변동 가능

ㅇ 건설공사장 준공 전 품질점검단 조치 결과 제출

- 품질점검단 점검사항에 대한 시정조치 후 준공(검사)하여 시공 품질 관리 강화

- 품질기준 미달 시설물은 시공사 책임으로 보수 조치 및 미이행시 벌점 부과 등 조치

□ 향후계획

ㅇ '24.06.04.~05.: 동주민센터 품질점검단 시민 추천 등 품질점검단 구성

ㅇ '24.06.10.~14.: 품질점검 시행 및 조치

붙임 : 1. 관련근거 1부.

2. 분야별 점검결과보고 서실 각 1부.  끝.